1. 각 부서별(팀단위) 주요업무 현황

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2015년 완료․진행(과업)사업 목록
강서도로사업소	관 리 단속과	18명	- 인사·복무·청사관리 - 예산·회계·계약 및 물품관리 - 운행제한차량 단속
	도 로 보수과	10명	- 일반시도의 아스팔트 포장도로 유지관리 - 제설 작업 시행 - 일반시도, 맨홀, 방호울타리, 도로옹벽, 방음벽 등 도로부속물의 유지관리 - 일반시도 교통안전시설(안전표시) 유지관리 - 중앙버스전용차로 및 자전거도로 유지관리	- 2015년 노후포장도로 정비공사-강서 1구역(60%) - 2015년 노후포장도로 정비공사-강서 2구역(90%) - 관내 포장도로 일상유지보수공사(80%) - 2015년 관내 포장도로 굴착복구공사(70%) - 2015년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(50%) - 2015년 관내 포장도로 굴착복구 사후정비공사(50%) - 도로,교통안전 부속물 유지관리(60%) - 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(75%) - 안양천길 고척지하차도 옹벽외 1개소 정밀점검용역(80%)
	시 설 보수과	7명	- 일반시도상 도로시설물의 유지관리 및 안전점검 - 풍수해 대책 계획 및 시행 총괄 - 일반시도상 도로시설물 세척업무	- 2015년 관내 도로시설물 일상유지보수공사(70%) - 서울교 보수공사(80%) - 외발산지하차도 보수공사(75%) - 고척2지하차도 보수공사(80%) - 도림천복개(좌안) 보수공사(0%) - 도로시설물 세척 용역(40%) - 개봉철도고가외 6개소 정밀점검용역(75%) - 외발산지하차도외 4개소 정밀점검용역(70%) - 고척교외 3개소 정밀점검용(80%) - 도림천하류복개외 1개소 정밀점검용역(100%)
	기전과	37명	- 도로기전시설물 유지관리업무 - 도로 경관조명 유지관리업무 - 교통안전시설(신호기, 안전표지) 유지관리 업무 - 어린이 보호구역, 횡단보도 정비 교통신호기 공사 업무 - 교통사고 잦은 곳, 교통신호기 개선 업무 - 교통신호기 원인자공사 관련업무 - 건설기계장비 및 차량운영 관련업무	- 2015년 도로기전시설물 유지보수공사(85%) - 2015년 경관조명 유지보수공사(75%) - 지하차도 노후기전시설 보완공사 (65%) - 지하차도 배수펌프 교체공사(100%) - 2015년 교통신호기 유지보수공사 강서/영등포 일부(85%) - 2015년 교통신호기 유지보수공사 구로/양천지구(86%) - 2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(60%) - 2015년 안전표지 유지보수공사(50%)

2. 상기 1항의 ‘2015년 완료, 진행사업 현황

1. 2015년 노후포장도로 정비공사(강서-1구역)

담당부서	팀 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	이승행	2657-7942

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후포장도로 정비를 통한 특별시도를 이용하는 시민 안전확보.

○ 위    치 : 강서구, 양천 관내 특별시도

○ 규    모 : 포장도로 정비 1,043a

○ 사업기간 : 2015.05.18.~2015.12.31.

○ 총사업비 : 3,040백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			3,040				28	3,012

□ 추진실적

○ 2015.05. : 계약 및 착공

- 오목로 등 4개 노선  630a 시공완료

□ 향후 추진계획

○ 2015.10.30. 시공 완료

○ 2015.11.30. 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

2. 2015년 노후포장도로 정비공사(강서-2구역)

담당부서	팀 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	구희옥	2657-7951

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후포장도로 정비를 통한 특별시도를 이용하는 시민 안전확보.

○ 위    치 : 강서구, 영등포구(일부)관내 특별시도

○ 규    모 : 포장도로 정비 677a

○ 사업기간 : 2015.05.18.~2015.11.30.

○ 총사업비 : 2,000백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			2,000				736	1,264	0

□ 추진실적

○ 2015.05. : 계약 및 착공

- 경인로 등 4개 노선  795a 시공완료

□ 향후 추진계획

○ 2015.10.30. 시공 완료

○ 2015.11.30. 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

3. 관내 포장도로 일상유지보수공사

담당부서	팀 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	천석기	2657-7941

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 소규모 손상의 신속한 보수로 안전사고 예방과 쾌적한 도로환경 제공

○ 위    치 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구(일부)

○ 규    모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 소규모 (t=5 ~ 20cm) - 239a

아스팔트 소파보수 - 43a, 노면표시 - 25,143m

○ 사업기간 :'15.03.30~'15.12.31

○ 총사업비 : 2,139백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			2,139	-	2,139		1,084	1,055	-

□ 추진실적

○ '15.03.26 : 공사계약

○ '15.03.30 : 공사착공

- 소파 포장복구 35a,

- 절삭후 덧씌우기 192a

○ '15.07.20 : 5차 작업지시

□ 향후 추진계획

○ '15.12.31 : 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

4. 2015년 관내 포장도로 굴착복구 공사

담당부서	팀 장	김권일	2657-7940
도로보수과	담당자	윤옥진	2657-7954

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시도 상의 굴착공사에 대한 당일 복구 및 포장면 차로 단위 복구  시행으로 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

○ 위    치 : 4개구 관내(강서구, 양천구, 영등포구, 구로구)

○ 규    모 : 소규모 포장 41a, 차로단위복구 296a

○ 사업기간 :'15.03.16~'15.12.31

○ 총사업비 : 2,000백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			2,000	-	2,000		300	1,700	-

□ 추진실적

○ '15.03.10 : 공사계약

○ '15.03.16 : 공사착공

- 아스팔트 굴착복구 240a

□ 향후 추진계획

○ ‘15.12.31 : 준공(예정)

□ 특이사항 :  없음

5. 2015년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사

담당부서	팀 장	김권일	2657-7940
도로보수과	담당자	윤옥진	2657-7954

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시도 상 불량맨홀의 신속한 정비로 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

○ 위    치 : 4개구 관내(강서구, 양천구, 영등포구, 구로구)

○ 규    모 : 맨홀정비 521개소

○ 사업기간 :'15.05.19~'15.12.31

○ 총사업비 : 500백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2013		2014							2015년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-			500	-	500		0	500	-

□ 추진실적

○ '15.05.15 : 공사계약

○ '15.05.19 : 공사착공

- 맨홀정비 260개소

□ 향후 추진계획

○ ‘15.12.31 : 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

6. 2015년 관내 포장도로 굴착복구 사후정비공사

담당부서	팀 장	김권일	2657-7940
도로보수과	담당자	윤옥진	2657-7954

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 굴착복구 시행 구간중 하자기간이 지난 도로포장상태의 불량구간에 대하여 신속히 정비함으로서 차량통행의 불편을 해소하고 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

○ 위    치 : 4개구 관내(강서구, 양천구, 영등포구, 구로구)

○ 규    모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 소규모 (t=5cm) - 326a

○ 사업기간 :'15.06.09~'15.11.30

○ 총사업비 : 708백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			708	-	708		0	708	-

□ 추진실적

○ '15.06.08 : 공사계약

○ '15.06.09 : 공사착공

- 절삭후 덧씌우기 165a

□ 향후 추진계획

○ ‘15.11.30 : 준공(예정)

□ 특이사항 :  없음

7. 도로,교통안전 부속물 유지관리

담당부서	과 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	김동민	2657-7952

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후 훼손된 도로,교통안전 부속물을 신속히 정비하여 안전사고 예방

○ 위    치 : 강서구, 양천구, 영등포구, 구로구

○ 규    모 : 중앙분리대 및 방호울타리정비 660m, 시선유도봉, 무단횡단금지시설,

델리네이터, 과속방지턱 등 유지보수 등

○ 사업기간 : 2015. 4 ~ 2015. 12

○ 총사업비 : 494백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  60%, 현재공정  60%, 계획대비 실공정율60%

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			494	-	494	-	-	494	0

□ 추진실적

○ 시선유도봉 정비 654개, 델리네이터 정비 700개, 갈매기표지 설치 32개

○ 방호울타리 도색 240㎡, 과속방지턱 도색 713㎡

○ 가드레일 정비 등

□ 향후 추진계획

○ 도로시설물 일상유지보수공사 : 2015.12.31.일까지 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

8. 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

담당부서	과 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	김동민	2657-7952

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노면표시를 신속히 정비하여 시민생활 불편 해소 및 안전사고 예방

○ 위    치 : 강서구, 양천구, 영등포구, 구로구

○ 규    모 : 차선도색 166,500m, 도로표지병 설치 200개 등

○ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 12

○ 총사업비 : 680백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  75%, 현재공정  75%, 계획대비 실공정율75%

□ 예산투자 현황 - 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			680	-	680	-	296	384	0

□ 추진실적

○ 노면표시 정비 및 신설 118,156m

○ 도로 표지병 설치 및 제거 138개

□ 향후 추진계획

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 2015. 12.31일까지 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

9. 안양천길 고척지하차도 옹벽외 1개소 정밀점검용역

담당부서	과 장	김권일	2657-7930
도로보수과	담당자	천석기	2657-7941

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 본 용역은 상태평가 및 안정성 평가의 기본자료를 제공하고 시설물의 상태와 노후화 정도에 따라 구조물의 개보수공사를 적기에 시행할 수 있도록 계획을 수립

○ 시 설 물 : 안양천길 고척지하차도 옹벽외 2개소

○ 위    치

- 안양천길 고척지하차도 옹벽 : 구로구 고척동 60-19호

- 가리봉철도고가 옹벽(오류방향) : 구로구 가산동 18-13호

- 가리봉철도고가 옹벽(시흥방향) : 구로구 가산동 18-14호

○ 사업기간 : 2015. 5.12 ~ 2015.10. 8

○ 총사업비 : 35백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 – 2015.08.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			35		35		0	35

□ 추진실적

○ ’15.05.08 : 정밀점검용역 계약

○ ’15.05.12 : 정밀점검용역 착수

○ ’15.08.25 : 용역 중간보고회 개최

□ 향후 추진계획

○ ‘15.09월중 : 정밀점검 결과 최종보고회 개최

○ ’15.10.08 : 용역 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

10. 2015년 관내 도로시설물 일상유지보수공사

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담 당 담 당	유태용 김승진	2657-7971 2657-7975

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시설물 점검결과 보수가 시급히 요구되는 사항을 적기에 처리하고자 함

○ 위    치 : 강서, 양천, 구로, 영등포 일대 도로시설물(교량,터널,복개,지하차도)

○ 규    모 : 신축이음교체, 콘크리트 단면보수, 표면보수, 난간보수등

○ 사업기간 : 2015.4.1.~2015.12.31

○ 총사업비 : 2,231백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준):계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율  100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			2,231		2,231		1,561	670

□ 추진실적

○ 2015. 3.13 : 공사설계 및 발주

○ 2015. 4. 1 : 공사착공

○ 2015. 4 ~ 8.30 : 작업시행(1차~6차)

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9 ~ 12월 : 추가 작업 시행

○ 동절기 대비 시설물 보수 조치등

○ 2015. 12.31 : 공사준공 예정

□ 특이사항 : 없음

11. 서울교 보수공사

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	윤동원	2657-7976

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 2013년 9월 정밀점검 용역결과 제2종시설물인 서울교 시설물 손상에 대한 보수공사를 적기 시행하여 안전성 및 내구성 향상으로 시민들의 안전한 통행을 확보하기 위함.

○ 위    치 : 영등포구 여의동 19 ~ 영등포동

○ 규    모 : 개질아스콘포장 63.87a, 도막방수(슈프림데크코트 M6) 6.387㎡,                   균열보수 169m, 표면보수 236m, 단면보수 12㎡ 등

○ 사업기간 : 2015. 6. 17 ~ 2015. 12. 13

○ 총사업비 : 1,023백만원

○ 누계 공정율(8월25일 기준) : 계획공정 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100%     - 부진사유 :

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.25 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			1023		1023		0	1023

□ 추진실적

○ 2015. 5.21 : 공사 발주

○ 2015. 6.17 : 공사 착수

○ 2015. 8.23 : 교량 도막방수 및 개질아스콘포장

○ 2015. 8.25 현재 : 중분대 및 표면보수 공사 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2015.12.13 : 공사 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

12. 외발산지하차도 보수공사

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김승진	2657-7975

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 정밀점검용역 결과에 대한 보수보강 공사를 실시하여 구조물 내구성 증진 및 안전성 확보

○ 위    치 : 강서구 발산동 283 ~ 공항동 899

○ 규    모 : 재포장 60a, 신축이음보수 319m, 기타 1식

○ 사업기간 : 2015. 5. 29 ~ 2015. 9. 25

○ 총사업비 : 400백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준) : 계획공정 75%, 현재공정 75%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2015		2014							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			400		400		21	379

□ 추진실적

○ 2015. 5. 8: 공사 발주

○ 2015. 5.29 : 공사 착수

○ 2015. 8.15 : 도로 재포장 및 신축이음보수 완료

○ 2015. 8.30 현재 : 공사 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9.25 : 공사 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

13. 고척2지하차도 보수공사

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김승진	2657-7975

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 정밀점검용역 결과에 대한 보수보강 공사를 실시하여 구조물 내구성 증진 및 안전성 확보

○ 위    치 : 구로구 고척동 62

○ 규    모 : 재포장 63a, 신축이음보수 198m, 기타 1식

○ 사업기간 : 2015. 6. 8 ~ 2015. 10. 5

○ 총사업비 : 450백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준) : 계획공정 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2015		2014							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			450		450		0	450

□ 추진실적

○ 2015. 5. 8: 공사 발주

○ 2015. 6. 8 : 공사 착수

○ 2015. 8.24 : 도로 재포장 및 신축이음보수 완료

○ 2015. 8.30 현재 : 공사 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2015. 10. 5 : 공사 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

14. 도림천복개(좌안) 보수공사

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김규춘	2657-7972

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 보수보강을 통한 시설물의 내구성 증진으로 안전성 확보

○ 위    치 : 구로구 구로5동 다송금호(A) ~ 거리공원오거리

○ 규    모 : 교면포장 A=42.19a, 단면보수(보강) 633㎡, 신축이음보수 135m

○ 사업기간 : 2015. 8. 25 ~ 2015. 11.30

○ 총사업비 : 983백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 0%, 현재공정 0%, 계획대비 실공정율 0%

- 부진사유 : 발주가 늦어져 현재 공정은 0%지만 정상 추진 중에 있음

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	983	-	972	-	0	972	-	-

□ 추진실적

○ 2015.6.10 : 제품선정위원회실시

○ 2015.7. 6 : 계약심사 의뢰

○ 2015.7.16 : 계약심사 결과 통보

○ 2015.7.23 : 공사발주

○ 2015.7.27 : 입찰공고

○ 2015.8.10 : 낙찰자결정

○ 2015.8. 현재 : 계약진행중

□ 향후 추진계획

○ 2015.8. ~ 11 : 공사시행

○ 2015.11.30 : 공사준공(예정)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

15. 도로시설물 세척 용역

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김규춘	2657-7972

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 매연,먼지,제설제 등으로 오염된 도로시설물에 대하여 주기적 세척을

시행함으로서 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성

○ 위    치 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구 관내

○ 규    모 : 총 17개시설 (터널 3, 지하차도 14)

○ 사업기간 : 2015. 4. 28 ~ 2015. 12. 31

○ 총사업비 : 478백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 40%, 현재공정 40%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	478	-	478	-	192	286	-	-

□ 추진실적

○ 2015.3.19 : 용역발주 및 시행

○ 2015.3.20 : 입찰공고

○ 2015.4.28 : 용역계약

○ 2015.4.29 : 용역착공

○ 1차 세척작업실시 : 2015.5.10 ~ 5.19

○ 1차기성 지급 : 2015.6.16 (88,682천원)

○ 2차 세척작업실시 : 2015. 7.2~7.29

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9월 : 3차 세척작업 실시

○ 2015.11월 : 4차 세척작업 실시

○ 2015.12.31 : 용역준공

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

16. 개봉철도고가외 6개소 정밀점검용역

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	유태용	2657-7971

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로시설물에 대한 정밀점검 실시하여 시설물의 기능유지 및 안전성 확보

○ 위    치 : 도로시설물 7개소(개봉철도고가, 가리봉철도고가, 오류IC, 신월IC, 시흥IC, 선유교, 서울교접속지하차도)

○ 규    모 : 정밀점검용역

○ 사업기간 : 2015.5.13.~11.08

○ 총사업비 : 130,801백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 75%, 현재공정  75%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			130		130		0	130

□ 추진실적

○ 2015. 3.25 : 용역발주

○ 2015. 4.24 : 용역계약

○ 2015. 5~8 : 외관조사 및 조사내용 정리

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9월중   : 중간보고회 실시

○ 2015. 10월중 : 최종보고회 실시

○ 2015. 11.    : 준공

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

17. 외발산지하차도외 3개소 정밀안전진단용역

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김승진	2657-7975

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 본 용역은 시설물의 상태와 노후화 정도에 따라 구조물의 개보수공사를 적기에 시행하여 시설물 기능유지와 안전성 확보하기 위함

○ 시 설 물 : 외발산지하차도, 구로구고차도, 구로1교, 영등포R IC, 공항입구지하차도

○ 위    치

- 외발산지하차도 : 강서구 발산동 283 ~ 공항동 899

- 구로고가차도 : 구로구 가리봉동 140

- 구로1교 : 구로구 구로동 181 ~ 영등포구 대림동 1089

- 영등포R IC : 영등포구 영등포역 주변

- 공항입구지하차도 : 강서구 공항동 74 ~ 방화동 621

○ 사업기간 : 2015. 4.30 ~ 2015. 11. 3

○ 총사업비 : 120백만원

○ 누계 공정율(8월30일 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			120		120		0	120

□ 추진실적

○ 2015. 3.25 : 외발산지하차도 외 4개소 정밀점검용역 시행

○ 2015. 5. 8 : 용역 착수

○ 2015. 8.20 : 외관조사망도 작성

○ 2015. 8.30 현재 : 용역 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9월중 : 정밀점검 결과 중간보고회 개최

○ 2015.11. 3 : 용역 준공(예정)

□ 특이사항 : 없음

18. 고척교외 3개소 정밀안전진단용역

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
도로시설과	담당자	윤동원	2657-7976

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로시설물에 대한 정밀점검 실시하여 시설물의 기능유지 및 안전성 확보

○ 시 설 물 : 도로시설물4개소(고척교, 광명교, 개봉고가, 오목교서측지하차도)

○ 위    치 : 구로동653~고척동62, 천황동~광명동, 개봉동353, 목1동409-74

○ 사업기간 : 2015. 4.27 ~ 2015. 10. 23

○ 총사업비 : 89백만원

○ 누계 공정율(8월25일 기준) : 계획공정 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100%     - 부진사유 :해당없음

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.25 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			89		89		0	89

□ 추진실적

○ 2015. 4.02 : 용역 발주

○ 2015. 4.22 : 용역 계약

○ 2015. 5~8 : 외관조사 및 조사내용 정리

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9월중   : 중간보고회 실시

○ 2015. 10월중 : 최종보고회 실시

○ 2015. 10.    : 준공

□ 특이사항 : 없음

19. 도림천하류복개외 1개소 정밀안전진단용역

담당부서	과 장	박병연	2657-7940
시설보수과	담당자	김규춘	2657-7972

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의한 시설물 정기점검 실시

○ 위    치

- 도림천하류복개 : 영등포구 물래동5가 27

- 염창I/C하류복개 : 강서구 염창동

○ 용역기간 : 2015. 4. 16 ~ 2015. 8. 17

○ 총사업비 : 30백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준): 계획공정100%, 현재공정100%, 계획대비 실공정율100%

- 부진사유: 정상추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	30	-	30	-	0	30	-	-

□ 추진실적

○ 2015.4. 7 : 설계 및 발주

○ 2015.4. 16 : 계약 및 착공

○ 2015.8. 12 : 최종보고회 개최

○ 2015.8. 17 : 용역준공

□ 향후 추진계획

○ 2015.8월 현재 : 용역성과품 검토 및 납품

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

20. 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	최 승 호	2657-7979

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로기전시설물 유지관리

○ 위    치 : 성산대교 등 49개소

○ 규    모 : 기전시설물 일상유지보수

○ 사업기간 : 2015. 3 ~2015. 12. 31

○ 총사업비 : 250백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정60%, 현재공정85%, 계획대비 실공정율 141%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
250	250	250	250	-	250		150	100		250

□ 추진실적

○ 가로등 및 터널, 지하차도 조명등 세척  8,017등

○ 조명등 안정기 및 램프 교체  222개

○ 유도표시등 교체 4개소, 방화문 교체 1개소, 가로등 표찰정비 118개 등

□ 향후 추진계획

○ 노후 및 고장 기전시설물 정비

○ 터널․지하차도 등기구글러브 세척(2차)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

21. 2015년 교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	하 상 철	2657-7962

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교량 경관조명시설물 일상유지 보수

○ 위    치 : 성산대교, 가양대교

○ 규    모 : 경관조명등 교체, 글러브 세척 등

○ 사업기간 : 2015. 3 ~2015. 12. 31

○ 총사업비 : 35백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정60%, 현재공정75%, 계획대비 실공정율 125%

□ 예산투자 현황 – 2015.  8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2014							2015년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
30	30	30	35	-	35		23	12	-	30

□ 추진실적

○ 노후 경관조명 등기구 교체     12등

○ 경관조명 램프, 안정기 교체   163등

○ 경관조명 등기구 글러브 세척  700등

□ 향후 추진계획

○ 경관조명시설 노후 및 고장설비 정비

□ 특이사항

○ 해당없음

22. 터널 및 지하차도 노후 기전시설 보수공사

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	한 영 호	2657-7961

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 지하차도 노후 배전반 및 CCTV 정비

○ 위    치 : 구로역, 신도림지하차도, 범박, 항동생태터널

○ 규    모 : 지하차도 배전반 교체 6면, 터널 CCTV 교체 7대

○ 사업기간 : 2015. 8 ~2014. 10.31

○ 총사업비 : 310백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정60%, 현재공정55%, 계획대비 실공정율 92%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	60	60	310	-	310		160	150	-	250

□ 추진실적

○ 구로역, 신도림지하차도 배전반 교체완료 6면

○ 범박, 항동생태터널 CCTV 설치중 7대

□ 향후 추진계획

○ 범박, 항동생태터널 CCTV 설치 및 시험

□ 특이사항

○ 해당없음

23. 지하차도 배수펌프 교체공사

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	하 상 철	2657-7962

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 지하차도의 노후된 배수펌프를 교체하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

○ 위    치 : 개화, 오금지하차도

○ 규    모 : 배수펌프 20HP 4대, 15HP 1대 교체

○ 사업기간 : 2015. 6 ~2015. 7

○ 총사업비 : 35백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	30	30	60	-	60		60	-	-	80

□ 추진실적

○ 개화지하차도 배수펌프(20HP 2대) 교체완료

○ 오금지하차도 배수펌프(20HP 2대, 15HP 1대) 교체완료

□ 향후 추진계획

○ 정기적인 시운전 실시

□ 특이사항

○ 해당없음

24. 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	박 태 진	2657-7964

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통신호기 유지보수

○ 위    치 : 강서구, 영등포구 일부

○ 규    모 : 제어기 325대, 교통신호등 4,812등, 음향신호기 870대 등

○ 사업기간 : 2015. 3. 10. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 440백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  60 %, 현재공정  85 %, 계획대비 실공정율 140 %

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
530	530	530	440	-	440	-	342	98	-	-

□ 추진실적

○ 노후 신호 제어기 교체 2면

○ 노후 신호등주 8본 신설 및 교체, 누전점검 및 접지보강

○ 노후 신호 케이블 1,500m 신설 및 교체

○ 잔여시간표시기 4대 설치

○ 음향신호기 42대 신설 및 교체

□ 향후 추진계획

○  신호등 신설 및 교체

○  신호등 노후 케이블 교체

○  민원사항 처리 등

□ 특이사항

○ 해당없음

25. 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	박 태 진	2657-7964

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통신호기 유지보수

○ 위    치 : 구로구, 양천구

○ 규    모 : 제어기 315대, 교통신호등 4,738등, 음향신호기 817대 등

○ 사업기간 : 2015. 3. 10. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 440백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  60 %, 현재공정  86 %, 계획대비 실공정율 143 %

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
520	520	520	440	-	440	-	347	93	-

□ 추진실적

○ 노후 신호 제어기 교체 5면

○ 신호등주 27본 신설 및 교체, 누전점검 및 접지보강

○ 노후 신호케이블 4587m 신설 및 교체

○ 잔여시간표시기 19대 설치

○ 음향신호기 73대 신설 및 교체

□ 향후 추진계획

○  신호등 신설 및 교체

○  신호등 노후 케이블 교체

○  민원사항 처리 등

□ 특이사항

○ 해당없음

26. 2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	홍 승 찬	2657-7989

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통신호기 신설 및 개량

○ 위    치 : 강서구, 구로구, 양천구, 영등포구 일부

○ 규    모 : 제어기 315대, 교통신호등 5,130등, 음향신호기 777대 등

○ 사업기간 : 2015. 3. 13. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 423백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  60 %, 현재공정  60 %, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
	520	520	423	-	423	-	199	224	-

□ 추진실적

○ 서울지방경찰청 신호 규제사항 14건 처리

- 제어기 신설 1대

- 신호등주 신설 및 교체 31본

- 전송선로 구축 2개소

□ 향후 추진계획

○  보행신호 음성안내 보조장치 4개소 설치 추진

○  일반신호에서 표준신호로 전환을 위한 전송선 5개소 구축 추진

○  서울지방경찰청 신호 규제사항 처리

□ 특이사항

○ 해당없음

27. 2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수 연간단가

담당부서	과 장	박 재 경	2657-7908
강서도로사업소	담당자	김 근 수	2657-7963

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통안전표지 유지보수

○ 위    치 : 강서, 영등포, 구로, 양천구

○ 규    모 :  교통안전표지 신설, 철거, 교체  229개소

○ 사업기간 : 2015. 3. 9. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 90백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정  50 %, 현재공정  50 %, 계획대비 실공정율 100 %

□ 예산투자 현황 - 2015. 8. 31기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
90	90	90	90	-	90	-	41	49	-	90

□ 추진실적

○ 교통안전표지 신설 및 교체 등  265개소

○ 서울지방경찰청 교통안전표지 규제사항 및 민원처리

□ 향후 추진계획

○ 규제사항 및 민원, 순찰 중 적출사항 처리 등

□ 특이사항

○ 해당없음