정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동호로~장터길 연결체계 개선
② 추진배경	성동구 동호로~장터길 연결구간 상습 지·정체 및 보행환경 개선
③ 사업개요	위 치 : 성동구 금호역(동호로) ~ 장터길 규 모 : 1차로 확장 및 보도신설 (폭 7→15m, 연장 105m) 총사업비 : 24,350백만원
④ 사업부서	안전총괄실 도로계획과		⑤ 담당자	도로계획과장(서기관) 권완택 도로계획과 이시정(2133-8083)
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2019.01.~2022.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업추진계획 수립 ※ 동호로~장터길 연결체계 개선사업 사업추진계획 보고 (도로계획과-12949)		‘18.10.11	김학진 안전총괄본부장 하종현 안전총괄관 안대희 도로계획과장 윤장혁 도로시설계획팀장 김대욱 주무관
○ 투자심사의뢰 ※ 2018년 수시 투자심사 의뢰서 제출(도로계획과-12545)		‘18.10.04	김학진 안전총괄본부장 하종현 안전총괄관 안대희 도로계획과장 윤장혁 도로시설계획팀장 김대욱 주무관
○ 투자심사결과 통보(적정) ※ 2018년 수시(10월) 서울시 투자심사 결과 알림 (재정관리담당관-11395)		‘18.11.05
○ 기본 및 실시설계시행 - 성동구 추진		‘19.03.~12.	손경철 성동구 안전건설교통국장 오석관 성동구 토목과장 오규형 성동구 주무관
○ 보상협의 중 - 성동구 추진		‘20.01.~현재	손경철 성동구 안전건설교통국장 오석관 성동구 토목과장 오규형 성동구 주무관
○ 공사 시행 - 성동구 추진 - 보상완료구간에 대한 건물철거 등 공사시행		‘20.10.~ ‘22.12.	손경철 성동구 안전건설교통국장 오석관 성동구 토목과장 이성환 성동구 주무관