문서번호	모빌리티충전운영-858		과장	모빌리티충전운영부장	에너지신사업처장	신재생에너지본부장	사장
보존기간	10년
결재일자
공개여부	비공개(5)
추산		()
감사
	2024년 서울시 공공충전시설 물품 제조·구매 계획
	2024년 서울시 공공충전시설 물품 제조·구매 계획
	2024. 2.
	서울에너지공사
	모빌리티충전운영부

2024년 서울시 공공충전시설 물품 제조·구매 계획

서울시민 생활권 전기차 5분 충전망 구축 관련 市 충전인프라 확충을 위하여 충전기 설치 수요조사를 반영한 공공충전시설 물품 제조·구매 계획을 보고드림

1		일반 현황

□ 추진근거

“서울특별시 전기차 충전인프라 구축 및 운영사업” 대행협약 체결(’21. 1. 1.)

친환경차량과-126(’24. 1. 3.)「2024년 공공 전기차 충전시설 설치부지 현장조사 협조 요청 및 추가수요 제출 안내」

모빌리티충전운영-339(’24. 1. 17.)「2024년 市-전기차 충전소 구축 대행 사업수행 계획(안)」

	<서울특별시 전기차 충전인프라 구축·운영 사업 대행 협약>
◇ 市(친환경차량과) ↔ 公社 간 대행협약 체결 ◇ 협약기간: 2021. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(48개월, 1년 연장) ◇ 협약금액: 매년 편성되는 市 예산 범위 내에서 지급 - 급속 240기 충전기 설치 대행사업비: xxxxxxxx만원(대행수수료: xxxxxxxx만원)

□ 사업개요

사 업 명: 2024년 서울시 공공충전시설 물품 제조·구매

사업규모: 156대(252기)*

* 기초자치구 대상 수요조사 결과 반영, 듀얼 충전기는 1대당 2기로 산정

(단위: 대)

급속충전기			완속충전기	합 계
100kW 듀얼	100kW 싱글	200kw 듀얼	7kW
22(44기)	26	74(148기)	34	156(252기)

사업기간: 계약일로부터 12월 31일까지

소요금액: xxxxxxxx원(부가가치세 포함)

예산과목: 자본예산 – 대행사업 – 자산취득비등(수탁자산취득비)

2		추진 내용

□ 주요내용

물품 공급 범위

기자재 운송, 설치 및 시운전에 필요한 모든 소모성 자재 및 관련 업무

품 명	규 격	단위	수량	비 고
급속충전기	100kW 듀얼	대	22	동시충전
급속충전기	100kW 싱글	대	26
급속충전기	200kW 듀얼	대	74	동시충전
완속충전기	7kW	대	34
소 계			156
캐노피	급속캐노피	대	83
	급속캐노피	대	6	충전상태 표시창 (사이니지) 연동
	완속캐노피	대	28
소 계			117
설치비	설치 및 시운전	식	1

납품위치: 현장설치도(전기공사 일정에 맞춰 순차적으로 제조 및 납품)

충전기 세부 설치 위치는 市 설치 수요조사 결과 액셀자료 참고(붙임 2)

충전기 및 부대시설 설치(결선 등) 관련 전기공사는 실시설계 완료 후 발주 예정

‘公社 전기차 충전인프라 관리시스템’ 연동체계 구축

충전기 ↔ 관리시스템 간 연계(국가기술표준원 기준 OCPP 1.6 통신규약 적용)

충전요금 결제 및 정산관리를 위한 실시간 통신 연동

충전기 운영관리를 위한 데이터 제공 및 실시간 모니터링 등

QR결제, 오토차징 및 향후 예약서비스 도입 등 스마트 충전서비스 기능 제공

3		추진 방법

□ 물품계약

입찰방법: 일반경쟁, 총액입찰, 공동계약 불가

입찰 참가자격

전기신사업법 제7조의2에 따른 “전기차자동차충전사업(업종코드: 7138)”을 입찰참가등록한 사업자

전기자동차용충전장치(세부품명번호 10자리 2611170403)를 입찰참가자격 등록한 업체(제조)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체

계약방법: 협상에 의한 계약

입찰공고: 긴급

친환경차량과-9994호(’23. 9. 5.) 관련 조기 준공을 위한 신속 추진

4		추진 일정

구 분	2월			3월				4월				비고
발주계획 수립 및 계약의뢰
입찰공고(구매규격 사전공개)
개찰 및 제안서 평가
협상진행 및 계약체결
물품제조 및 납품준비

※ 추진일정은 제안서 평가결과에 따라 변경될 수 있음

붙임  1. 서울시 관련 공문 1식.

2. 2024년 전기차 공공 충전설치 수요조사  1부.

3. 제안요청서, 규격서 각 1부.

4. 산출내역서 1식.  끝.