■관급자재 납품기한 연기현황
1.밤고개로확장3차공사(SH구간)-2구간 (예산 : 세입세출외현금)
No	품 명	단위	계약수량	납품기한		비 고
	계약번호(납품요구번호)			당초	변경
1	이형봉강(SD30)D13	ton	1.765	2018.12.30	2019.06.30	현대제철 주식회사
	12-18-1-18047-00					02-772-2075
2	이형봉강(SD30)D16	ton	1.757	2018.12.30	2019.06.30	현대제철 주식회사
	12-18-1-18047-00					02-772-2075
3	이형봉강(SD30)D19	ton	3.523	2018.12.30	2019.06.30	현대제철 주식회사
	12-18-1-18047-00					02-772-2075
4	이형봉강(SD30)D22	ton	2.513	2018.12.30	2019.06.30	현대제철 주식회사
	12-18-1-18047-00					02-772-2075

No	품 명	단위	계약수량	납품기한		비 고
	계약번호(납품요구번호)			당초	변경
5	이형봉강(SD30)D29	ton	0.068	2018.12.30	2019.06.30	현대제철 주식회사
	12-18-1-18047-00					02-772-2075
6	안전유도블럭,선형	개	1,456	2018.12.30	2019.06.30	(주)에코제이피
	12-18-1-20200-00					031-672-0296
7	콘크리트벤치플륨관 300x300x2000mm	본	17	2018.12.30	2019.06.30	(주)태성
	12-18-1-18124-00					031-636-9991
8	콘크리트벤치플륨관 400x400x2000mm	본	43	2018.12.30	2019.06.30	(주)태성
	12-18-1-18124-00					031-636-9991
9	철근콘크리트용배수로관 300x300x1000mm,기본집수형	본	56	2018.12.30	2019.06.30	(주)태성
	12-18-1-18124-00					031-636-9991
10	철근콘크리트용배수로관 300x300x2000mm,기본형	본	403	2018.12.30	2019.06.30	(주)태성
	12-18-1-18124-00					031-636-9991

No	품 명	단위	계약수량	납품기한		비 고
	계약번호(납품요구번호)			당초	변경
11	철근콘크리트용배수로관 300x300x2000mm,점검구형	본	46	2018.12.30	2019.06.30	(주)태성
	12-18-1-18124-00					031-636-9991
12	볼라드,D130xH870,매립식	개	89	2018.12.30	2019.06.30	(주)에이치씨테크
	12-18-2-12138-00					031-705-6009
13	노면표지용페인트,흰색,융착식, JS4W-P4-R5-RW4	포	477	2018.12.30	2018.06.30	주식회사 정석케미칼
	12-18-1-18125-00					063-260-2277
14	노면표지용페인트,노란색,융착식, JS4Y-P4-R4-RW4	포	197	2018.12.30	2018.06.30	주식회사 정석케미칼
	12-18-1-18125-00					063-260-2277