DDP 시각장애인 보행편의용점자블록 구축 결과보고
2016 . 06 . 02.
문서번호	시설관리팀-1699			주임		팀장	본부장		단장	대표이사
결재일자	2016.06.08.			06/02 조정훈		06/07 이호섭	06/08 최구환		06/08 최훈근	06/08
										이근
공개여부	공개			협 조		책임	팀장
방침번호	대표이사방침 제(1658)호					06/08 김지혜	06/08 박진배
추진근거		- 「DDP 보행편의용 장애인 점자블록 구축계획」 시설안전팀-3309(2014.12.31.)호 - 「동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사 준공 후 잔여비용 반납」 도시기반시설본부 건축부-5830(2016.5.4)호
대 내 외 협력현황		부서(단체)명			협의내용			협의결과
		서울시 문화본부 디자인정책과 (담당 : 문현일 주무관)			DDP 단지 내 시각장애인 안전‧안심 보행을 위한 점자블록 구축 ※ 근거 : 장애인‧노인‧임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 제 8조 1항 및 동법시행령 제4조			- - 서울디자인재단 : 점자블록 구축 공사관리
		서울시 도시기반시설본부 (담당 : 조민형 계장)						- 점자블록 설계 및 시공 업체 선정 - 점자블록 준공검수
사 업 비 (정산)		‘14년 110,000천원(VAT포함 / 콘텐츠구축사업비(2013년 민간대행사업비)) (서울디자인재단→도시기반시설본부)
		‘16년 잔여 반납금 40,995,300원 (A – B = C) A : 서울디자인재단 지원금 110,000,000원 B : 점자블록 준공금액 69,004,700원 C : 잔여 반납금 40,995,300원 (도시기반시설본부→서울디자인재단→서울시 디자인정책과)
서울디자인재단 (시설관리팀)

사전 검토항목 ※ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검토여부 ‘■‘ 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 □ (						) 무 ■
	이 해 당 사 자 :	유 □ (						) 무 ■
	전 문 가 :	유 □ (						) 무 ■
	옴 브 즈 만 :	유 □ (						) 무 ■
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 □	환경 □				재해 □		기타 ■				무 □
		고용효과 □			노동인지 □					균형인지 □
	기 타 :	취약계층 □		성인지 □				장애인 ■			디자인 ■
		갈등발생 가능성 □				유지관리 비용 □						무 □
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 □ (						) 무 ■
	민 간 단 체 :	유 □ (						) 무 ■
	기 업 :	유 □ (						) 무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 :	유 ■ ( 서울시 디자인정책과 도시기반시설본부 건축부						) 무 □
	관 련 단 체 :	유 □ (						) 무 ■

DDP 시각장애인 보행편의용

점자블록 구축 결과보고

한국시각장애인연합회의 자문을 통한 DDP 내 시각장애인의 보행안전 및 편의를 위한 점자블록 구축사업 완료에 따른 결과보고를 드립니다.

1. 개 요

▫ 공사명 : DDP 시각장애인 보행현의용 점자블록 구축공사

- 설계 : 동대문디자인플라자 장애인편의시설 개선사업 수립용역

- 시공 : 동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사

▫ 2014년 지원금 : 110,000,000원

(서울디자인재단→도시기반시설본부)

- (재)서울디자인재단 콘텐츠구축사업비(2013년 민간대행사업비) 사용

∙ 설계용역사 : ㈜휴먼케어(대표 : 한치영)

∙ 설계용역금액 : 9,398,400원

∙ 시 공 사 : ㈜민정토건(대표 : 백승언)

∙ 준공금액 : 59,606,300원

- 도시기반시설본부 총 사용금액 : 69,004,700원

▫ 2016년 잔여 반납금 : 40,995,300원

(도시기반시설본부→서울디자인재단→서울시 디자인정책과)

지원금 (A)	설계비 (B)	시공비 (C)	잔여반납금 A-(B+C)
110,000,000원	9,398,400원	59,606,300원	40,995,300원

2. 추진경위

▫ 2014.12.31. : 구축사업계획 수립

▫ 2015.01.    : 사업비 지급(서울디자인재단 → 도시기반시설본부)

▫ 2015.02.23. : 기본계획 수립 용역 착수

▫ 2015.04.22. : 기본계획 수립 용역 준공

▫ 2015.06 ~ 09 : 공사관련 협의(서울시 디자인정책과 및 도시기반시설본부)

▫ 2015.10.21. : 공사 발주

▫ 2015.11.13. : 공사 착공

▫ 2016.02.29. : 공사 준공

▫ 2016.03.    : 한국시각장애인연합회 및 에이블뉴스 측 구축현장확인

▫ 2016.06.    : 공사 결과보고

▫ 2016.06.    : 잔여금 반납(도시기반시설본부→서울디자인재단→디자인정책과)

3. 구축현황

▫ 점자블록 구축 위치 (총 616m, 6개소)

지상 1F

미래로 상부 ①	미래로 상부 ②	살림터 D5앞

알림터 A3앞	갤러리문 K9앞	주차장 입구

지하 2F

어울림광장-지하철출입구	어울림광장-종합안내소	어울림광장-미래로하부

4. 잔여금 반납

▫ 잔여금 반납진행(①→②)

① 도시기반시설본부→서울디자인재단

- 잔여금액 : 40,995,300원

- 반납계좌 : 우리은행 1006-001-391428

- 계좌명 : 2013디디피콘텐츠구축

② 서울디자인재단(기획경영팀)→서울시 디자인정책과

- 2016년 6월(상반기) 반납완료예정

붙   임 : 1. DDP 보행편의용 장애인 점자블록 구축계획(시설안전팀-3309, ’14.12.31) 1부

2. DDP 장애인편의시설 개선사업 기본계획 수립 종합 용역보고서 1부

3. 동대문디자인플라자 장애인점자블럭 설치공사 준공 후 잔여비용 반납(서울시 도시기반시설본부, 건축부-5830,’16.05.04) 1부