소방관서 보수,보강공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 1월~2014. 6월

○  규    모 :

- 영동119안전센터 방수공사 : 17,741천원

- 강남소방서 청사환경개선공사 : 65,000천원

○  추진방식 : 전자공개수의계약

○  총사업비 : 금82,741천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	82,741	23,818	3,000	58,923	28.8%
사무관리비
공공운영비
시 설 비	82,741	23,818	3,000	58,923

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 90% / 실적 28.8%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 : 2월 ◦설계계약 및 입찰 : 3월 ◦설계준공 : 4월 ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦착공 : 5월 ◦준공 : 6월 ◦공부정리 등 : 6월	◦방침수립 : 2.20. ◦기술용역타당성심사 완료 : 2.28. ◦실시설계용역 : 3.14 ~ 4.12. ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦착공 : 5. 19~

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 없음

○  개선방향

- 없음

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 윤영재 담당자 : 김은덕