작 업 계 획 서

▣ 작업내용 : 동호대교 북단 CCTV 이전 설치(뚝섬로)

▣ 작업일시 : 2014년 05월 16일(금) 23:00 ~ 2014년 05월 17일(토) 06:00

▣ 작업순서도

23:00		이설작업준비					장비 및 인원 확인, 안전교육 시행
~ 24:00		교통시설물 설치 및 교통 통제					사인보드카 2대 라바콘 안내간판 신호수 2명/일 보통인부 4명/일
24:00 ~ 05:30		크레인 설치, CCTV 해체 및 이설작업					5TON, 25TON 각1대 설비공 5명/일
~ 06:00		현장정리 및 교통소통