문서번호	기전과-8584
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	10/27 代박영종
협조
	주무관		이명호

『2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

설계변경 검토보고

2016. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

설계변경 검토보고

「2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)」설계변경 서류가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ ㈜건영이앤씨 건영 본16-10-04호(2016.10.18.)

- 1차 설계 변경

○ 성동도로사업소 기전과-6536호(2016.08.19.)

- 제2차 작업지시 실정보고 검토 보고

○ 성동도로사업소 기전과-8514호(2016.10.25.)

- 제1,3차 작업지시 실정보고 검토 보고

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)

○ 도 급 자 : ㈜거승이엔씨 대표 김주완

○ 도 급 비 : 금283,323,800원(금이억팔천삼백삼십이만삼천팔백원)

○ 공사기간 : 2016. 03. 17. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : ㈜건영이앤씨 조순재

▣ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)의 작업지시에 대하여 예상공정량 계약분 대비 작업지시 공정량 물량변경 및 신규항목 추가 변경사항이 발생하여 설계변경을 하고자 함.

○ 공사비 정산내역                                     (단위 : 원)

연번	구분	당 초	변경금액	증, 감
1	1차 작업지시	128,744,000	110,181,500	감) 18,562,500
2	2차 작업지시	50,784,400	36,540,900	감) 14,243,500
3	3차 작업지시	91,031,600	90,901,820	감) 129,780
합 계		270,560,000	237,624,220	감) 32,935,780

○ 도급비 변경내용

구 분	당초	변경	증·감액	비 고
도급비	305,149,220	305,149,220	-	금액변경 없음

▣ 조치의견

○ 상기와 같이『2016년 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙     임 : 1. 1구역 설계변경 제출 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 실정보고 검토보고 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 제비율검증 1부. 끝.