문서번호	도로보수과-10612
결재일자	2016.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	10/25 代박종윤
협조
	주무관		이상하

2016년 자전거도로 유지보수사업

시행계획 보고(구산역, 신사오거리)

2016.  10. 25.(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 자전거도로 유지보수사업

시행계획 보고(한강대로 외 5개소)

2016년도 자전거 우선도로 설치, 자전거횡단도 정비, 공공자전거 운영 확대사업 시행 구간인 한강대로 외 5개소에 대하여 안전하고 편리한 자전거 이용활성화를 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 자전거도로 유지보수(한강대로)공사 예산배정 및 공사시행 협조 요청

- 자전거정책과-3322(2016.09.27.) 예산배정액 : 70,880천원

○ 자전거도로 유지보수사업(월드컵로) 예산재배정 및 공사시행 협조 요청

- 자전거정책과-4173(2016.10.17.) 예산배정액 : 170,210천원

○ 자전거도로 유지보수사업(원효로 등) 예산재배정 및 공사시행 협조 요청

- 자전거정책과-4344(2016.10.21.) 예산배정액 : 21,860천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 자전거도로 유지보수사업

○ 위    치

- 용산구 한강대로(숙대입구역~한강대교북단)

- 마포구 월드컵로(마포구청~합정역)

- 용산구 원효로(원효로4가~남영역)

- 은평구 연서로(은평경찰서 앞~연신초교삼거리)

- 은평구 통일로(박석고개~녹번역)

- 은평구 가좌로(신사동고개~명지대입구)

○ 총사업비 : 219,233천원

○ 개선내용 : 자전거 횡단도 및 우선도로설치, 노면표시 개선 등

○ 주요 시설물설치 내용

자전거횡단도(1)	자전거횡단도(2)	노면표시	테이프형 차선
		자 전 거 우선도로

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 193,685천원(관급자재 포함)

- 노면표시 도색 : 19,827m

- 노면표시 제거 : 15,514m

○ 테이프형 차선(자전거) 설치 : 25,548천원(조달구매, 현장설치도)

- 자전거 표시(1.5m)   : 272개

- 자전거 표시(1.0m)   :  20개

- 우선도로 표시(1.5m) : 268개

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지 기간소요 등으로 별도 발주 시행은 곤란하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행코자 함.

- 공사기간 : 2016. 10. 25. ~ 2016. 12. 10.

- 필요금액 : 약 169,802천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량 사용 후 정산.

- 자전거우선도로 테이프형 차선(자전거마크)은 조달구매로 설치완료하고 추후 정산.

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	노면표시		테이프형 차 선 (관급)	집행잔액
		도급비	관급비
자전거도로 유지보수	262,950	169,802	23,883	25,548	43,717

○ 예산과목

- 자전거정책과, 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2016. 10. 25 : 개선공사 작업지시 및 공사 시행.

○ 2016. 10. 26 : 관급자재 조달 구매 의뢰

○ 2016. 12. 10 : 개선공사 완료

○ 2016. 12. 20 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과보고

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 2부.

3. 관련 문서 3부.  끝.