‘양재천 사면녹화 개선사업 실시설계용역’

용역기간 연장 검토보고

주무관	양재천관리팀장	공원녹지과장	도시환경국장
안지연	고대영	한정훈	전결 10/28 배경섭

『양재천 사면녹화 개선사업 실시설계용역』 건의 용역기간을 아래와 같이 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 용역 개요

용 역 명 : 양재천 사면녹화 개선사업 실시설계용역

용역기간 : 2016. 08. 31 ~ 2016. 10. 31

용역개요

- 양재천 호안블럭 노출지역 수목 및 지피식물로 녹화

도 급 비 : 금10,708,600원

계약업체 : 나원이엔지(주) 대표 장 경 규

2. 준공기한 연기사유

연기사유

- 주민건의사항 및 민원사항 반영, 공법 등 검토 등에 따른 주민설명회 실시로 인한 절대공기 부족

준공기한 연기

계약일자	당 초	변 경
2016. 08. 29	2016. 08. 29 ~ 10. 31	2016. 08. 29 ~ 11. 30

연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)

지체상금 부과여부 : 미부과

3. 보고자 의견

상기와 같이 용역기간을 연장 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.