				★ ◎										본부장 방침 제662호
문서번호	건축사업부-5013			부 원			부원				건축사업부장			마곡위례사업단장				택지사업본부장
보존기간	10년																			10/27
				권효정			이동구				김용섭			이광윤				정현규
결재일자	2016.10.27
공개여부	공개			협조	위례사업부장			김영배		기전사업부장			정기철			공동체지원부장			손명호
					조경사업부장			박진옥		공공임대부장			주홍석			송파센터장			남순섭
일상감사	대상아님
위례지구 A1-10BL아파트 건설공사
총괄컨트롤타워회의 및 월간공정회의 결과 보고
		서울주택도시공사
(건축사업부)

위례지구A1-10BL 아파트 건설공사

총괄컨트롤타워 회의 및 월간공정회의 개최 결과 보고

공동주택 사업추진과 관련하여, 총괄공정회의 및 컨트롤타워의 통합운영체인 총괄컨트롤타워 회의와 월간공정회의를 개최하고 그 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ				개 요

□ 관련근거

- 사장방침 제503호(2014.07.31.) 「단계별 중점관리 매뉴얼 작성 보고」

- 사장방침 제968호(2015.11.12.) 「건설공사 진행 단계별 공정회의 개선 검토(안)」

□ 공사개요

위    치

송파구 위례택지개발지구내 A1-10BL

대지면적

105,589㎡(31,997평)

도급금액

172,277,337,000원

공사기간

2014.11.10. ~ 2017.08.08.(1,003일간)

現(현) 공정율

계획 65.26%/실시 68.81%(105.4%달성)

시공사

계룡건설산업(주)

감리단

㈜전인CM건축사사무소 외 1개사

사업개요

건폐율

17.03%

용적율

168.44%

연면적

177,857㎡

층수

지하2층~지상21층(23개동)

세대수

국민임대	39㎡	440	1,202	2,200
	49㎡	762
장기전세	59㎡	556	998
	74㎡	442

용도

공동주택(아파트), 근린생활시설, 유치원 등

Ⅱ				회의결과 보고

▣ 총괄컨트롤타워 회의

□ 장소 : 위례지구 A1-10BL 아파트 건설공사 상황실

□ 일시 : 2016.10.25.(화) 10 : 30

□ 참석자

- 서울주택도시공사 : 택지사업본부장, 마곡위례사업단장, 위례사업부장, 건축사업부장, 조경사업부장, 기전사업부장, 공공임대부장, 각 공종 감독

- 위례지구 A1-10BL 아파트 건설공사 현장대리인, 감리단장

□ 회의내용

- 회의내용 요약

· 추진공정에 따른 입주일정 검토

· 부대시설 및 근린생활시설 계획의 적정성 검토

· 부대시설 및 근린생활시설 운영상 문제점 검토

· 기타 유의사항 검토

※ 회의자료(비밀번호 : 1111) 및 첨부 회의록 참조

□ 회의사진

▣ 월간공정회의

□ 장소 : 위례지구 A1-10BL 아파트 건설공사 상황실

□ 일시 : 2016.10.25.(화) 14 : 00

□ 참석자

- 서울주택도시공사 : 택지사업본부장, 마곡위례사업단장, 위례사업부장,    건축사업부장, 조경사업부장, 기전사업부장, 각    공종 감독

- 위례지구 A1-10BL 아파트 건설공사 현장대리인, 감리단장

□ 지시사항

- 공통분야 지시사항

· 건축, 토목, 조경분야 통합하여 이삿짐차량동선, 동출입구 레벨, 쓰레기 분리수거장 검토

· 동출입구 앞 보도에 맨홀 보이지 않도록 조정

· 장지지하차도방면 단지 부출입구 확보 공종간 협조

- 회의 안건(타공종 업무협조 요청사항) 관련 지시사항

· 비상차로 폭 확보관련 검토사항

; 통일성 있는 계획으로 재검토

· 2317동 주변 되메우기 구간 침하방지 검토사항

; APRON설치구간 확대 또는 EPS시공 등 다양한 방법 추가 검토

※ 회의자료(비밀번호:2222) 참조

Ⅲ				행정사항

□ 관련부서 회의결과 통보

□ 월간공정회의 지시사항 반영 조치

□ 회의비 회계처리

붙임  회의록_총괄컨트롤타워회의.  끝.