주간 진척보고서				시스템명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
문서번호	R161028	작성자	박성원	작성일	2016/10/28	버 전	1.0

프로젝트명	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	25.78/50.0	17.07/40.0	6.21/10.0	49.07/100.0
		실적	25.78/50.0	17.07/40.0	6.21/10.0	49.07/100.0

주요 내용	1. 수치표고모델 변환 작업(공간정보산업진흥원) 2. 항공사진 DB구축(기무사 보안 처리중(270매완료/총340매) / 2차 항공사진 촬영분 입수(2016.10.25.일)-1053매 입수
업무구분	금 주 실 적 (2016.10.24 ~ 2016.10.28)	차 주 계 획 (2016.10.31 ~ 2016.11.04)
사업관리	1. 사업관리 - 중간보고회 수행 일시 : 2016년 10월 17일 오전 10:00 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층) - 월간보고 작성(10월)	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크
시스템개발	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능 테스트 : SMS TEST 준비중 - 시도행정 연계 : 방문민원 정보 조회 : 건축기획과에서 화면으로 입력 하기로 함 - 항공사진 정사영상 지도 연계 - 개발중	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능 테스트 : Email TEST - 항공사진 정사영상 지도 연계 - 항공사진 신청기능 보완
D B 구 축	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 기무사 보안 처리(총 340매 중 270매 완료) - 2차 수집 자료 현황 ∎ 입수일 : 10월25일(화) ∎ 항공사진 매수 : 1053매 : 13~28코스 / 50~52코스/ 64~68코스 수집 완료 - 2차 입수 자료 분석 및 확인 : 포맷 및 에러 데이터 확인(진행중) : 주기 표시 및 사진 외곽선 유무 확인(진행중) 2. 수치표고모델 - 누락지역 DEM 데이터 재 수집 ∎ 입수일 : 10월27일(목) (공간정보산업진흥원 제공) - 공간정보산업진흥원 제공 DEM 변환 작업 완료 ※ 2016년 촬영본 항공사진 미수집 리스트(총 13개 코스) - 29~34코스 - 49코스 - 53~58코스	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 기무사 보안 처리 - 2차 입수 자료 분석 및 확인 : 포맷 및 에러 데이터 확인 : 주기 표시 및 사진 외곽선 유무 확인 - 파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 : JPEG2000 변환 작업(60%완료) : 진북방향 확인 및 편집(30%완료) - 주기표시 삭제 : 해상도 10Cm 주기 삭제 2. 수치표고모델 - 국토지리정보원 제공 DEM변환 작업(2009년도)
이슈사항