2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역

월간업무보고서

- 10월 월간업무 현황보고 -
(2016. 10. 04 ~ 2016. 10. 28)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ_AS_MWR_10	PM	감독관
작 성 자	박 성 원
보 고 일	2016년 10월 31일

사업 기간		2016.07.12 ~ 2016.12.31			실적기간		2016.10.04 ~ 2016.10.28
프로젝트명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역			사업자명		㈜씨엠월드 PM 박 철 희
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	23.41	20.18	86.20	53.81	49.06		91.17	23.29
사업 관리	10	1.54	1.44	93.51	6.35	6.21		97.80	1.59
내부업무 시스템 통합	50	5.56	4.07	73.20	28.75	25.78		89.67	6.30
항공사진 DB 구축 및 변환	40	16.31	14.67	89.94	18.71	17.07		91.23	15.40

	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역 월간보고 (10월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박철희
	문서번호:PJ_AS_MWR_08-08월간업무현황보고서_1028	버전: 1.0		작성일자: 2016/10/28

금 월 실 적 (10/04 ~ 10/28)
사업관리	1. 사업관리 o 월간보고(9월) o 개발 및 DB구축 일정 체크 o 중간보고회 수행 일시 : 2016년 10월 17일 오전 10:00 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층)
내부업무 시스템 통합	1. 기능 개발 o 촬영회차, 주점/성과 관리 기능 개선(완료) - Tab으로 구분되게 UI개선 o 항공사진 신청 / 승인 알람 기능(개발중) - 항공사진 다운로드 신청 및 승인 요청 발생 시 관리자에게 알림 기능 제공 a. SMS 테스트 중 b. Email 송부는 서울시에서 제공하는 API 자료 수신 대기중 o 시도행정 연계(완료) - 방문민원 정보 조회와 관련하여 분석결과 건축기획과에서 화면으로 입력하기로 함 o 항공사진 정사영상 지도 연계 기능(개발중) - 인트라넷에서 제공하는 정사영상 지도 연계 기능(IWS)을 대체함 - Cmworld엔진 교체로 인한 개발
항공사진 DB구축 및 변환	1. 항공사진 DB변환 및 정비 (1차 촬영본 : 1,543매) o 자료 분석 및 확인 - 포맷 및 에러 데이터 확인 완료 - 주기 표시 및 사진 외곽선 유무 확인 완료 o 파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 완료 o 주기표시 삭제 - 해상도 10Cm 주기 삭제 완료 o 기무사 보안 처리 작업중 - 총 340매중 270매 완료
	2. 자료 인수 o 2016년 항공사진 2차 촬영본 입수 - 입수일 : 2016년 10월 25일(화) - 항공사진 매수 : 1,053매 o 수치표고모델 누락 데이터 입수(공간정보산업진흥원) - 입수일 : 2016년 10월 27일(목) - 데이터 포맷 : img - 입수 데이터 현황 □ 은평구 일부, 성동구 일부, 광진구 일부, 강동구 일부, 송파구 일부, 관악구 일부, 강서구 일부
	3. 항공사진 DB변환 및 정비 (2차 촬영본 : 1,053매) o 자료 분석 및 확인 - 포맷 및 에러 데이터 확인(진행중) - 주기 표시 및 사진 외곽선 유무 확인(진행중)
	4. 수치표고모델 구축 o 국토지리정보원 제공 DEM 자료 변환 구축 - 2001, 2011년 완료 - 2009년 구축중 o 공간정보산업진흥원 제공 DEM 자료 변환 구축 완료

익 월 계 획 (2016/10/31 ~ 2016/11/30)
사업 관리	1. 개발 및 DB구축 일정 체크
	2. 주간 및 월간 보고
내부업무 시스템 통합	1. 시스템 구현 o 항공사진 정사영상 지도 연계 기능 o 3D 지도 제어 기능 - 이동, 축소, 확대 - 지도 이전/다음. 따로/같이/이어보기 - 지도 저장 및 출력 - 2D/3D 화면 전환
항공사진 DB구축 및 변환	1. 항공사진 DB변환 및 정비 (2차 촬영분) o 자료 분석 및 확인 o 파일명 표준화 o 항공사진 성과내역 구축 o 파일 포맷 변환 o 진북방향 편집 o 사진주점 좌표 확인 및 정비 o 해상도 변경 2. 항공사진 DB변환 및 정비 (1차 촬영분) o 기무사 보안 처리 3. 국정원 보안 처리 o 국정원 보안심사 신청 o 국정원 보안처리 작업 o 국정원 보안 심의 후 결과 반영

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
내부업무시스템 통합
DB변환 및 정비

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자