투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사시행 통보)

1. 업무지시현장 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 주식회사 천일, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 (주)이산, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 주식회사 한맥기술

2. 작 성 일 자 : 2016-11-01 11:11:15

3. 지 시 내 용

가. 도시기반시설본부-16-6584(2016. 08. 08.)호와 관련입니다.

나.『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』에 대하여 소규모환경영향평가 용역시행 및 하천점용허가협의로 인해 공사를 일시중지(‘16. 08. 09.~ 10. 30.)하였으나,

다. 소규모환경영향평가 용역시행 완료에 따른 하천점용허가가 승인 예정임에 따라 ‘16. 11. 01. 공사시행을 통보 하오니 공사 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이현국			터널건설과장					11/01 권혁대
협조자
시행			토목부-22271									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2569						/전송			02-3708-2599					/	leehk1@seoul.go.kr												/	대시민공개