문서번호	교통행정과-53082
결재일자	2016.11.3.
공개여부	대시민공개

주무관	교통개선담당	교통행정과장	안전건설교통국장		부구청장	구청장
안병원	김종식	이상수	박형중		김병환	11/03 김영배
협 조
	정무보좌관			윤정배

2016년 어린이보호구역 태양광 LED 교통안전표지 설치계획

2016. 10.

안전건설교통국

교통행정과

2016년 어린이보호구역 태양광 LED 교통안전표지 설치계획

어린이보호구역내 ‘태양광 LED 교통안전표지’ 설치를 통하여 야간 어린이 교통사고 예방 및 안전한 통학로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 2016년 어린이보호구역 LED 도로표지판 현황조사(서울시 환경정책과-1077, 2016.1.21)

❍ 2016년 어린이보호구역 LED 교통안전표지 수요조사 자료 제출(교통행정과-3826, 2016.1.27)

❍ 태양광 LED 안전표지판 사업비 배정 210,432천원(서울시 환경정책과-10118, 2016.6.16)

Ⅱ		사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 2016년 어린이보호구역 태양광 LED 교통안전표지 설치

❍ 사업대상 : 성북구 어린이보호구역 내(42개교, 82개소)

❍ 사업내용 : 구형 어린이보호구역표지판 ⇒ ‘태양광 LED 표지판’으로 교체, 신설

어린이보호구역 표지판 (반사지 형)	⇒	태양광 LED 교통안전표지
		주간	야간

❍ 설치개소 : 42개교(초등학교 25개교, 특수학교 1개교, 유치원 16개교)

어린이보호구역 내 82개소 교체 또는신설 (※위치도 별첨)

❍ 태양광 LED 교통안전표지 제원 : 가로 700mm × 세로 1190mm (고가의 태양광 LED 표지 파손 예방 및 도로폭 등을 고려하여 700mm × 1190mm 적용 설치)

Ⅲ		추 진 현 황

❍ 2016.1.21 : 어린이보호구역 태양광 LED 안전표지판 수요 조사(서울시)

❍ 2016.1.27 : 태양광LED 안전표지판 수요조사결과 제출

❍ 2016.6.16 : 태양광 LED 안전표지판 사업비 재배정 (210,432천원)

❍ 2016.7.~10. : 성북구 어린이보호구역 내 통합표지판 현장조사

❍ 2016.10.21 : 설치수량 및 설계내역서 작성(42개교 자체설계)

❍ 2016.10.24 : 관할경찰서(성북서, 종암서) 설치 검토 협의

❍ 2016.11.~12. : 공사시행, 완료 (예정)

< 학교별 설치 위치도(예시) >

Ⅳ		사 업 계 획

❍ 총사업비 : 210,432천원(시비보조금)

- 태양광 LED 교통안전표지 구매(관급자재) : 189,618천원

- 교통안전표지 지주 설치 등 : 21,814천원

(지주공사 : 21,214천원, 감리용역 : 600천원)

(※ 낙찰차액 등 잔액 발생시 추가설치 등으로 시비보조금 불용 최소화 추진)

❍ 사업수행시 고려사항 (※ 서울시 권고)

- 경찰청 교통안전표지 표준지침(‘15.4.8개정) 준수

- 국토교통부 교통신기술 우선적용 및 구매 권고

(※ 국토교통부 신교통개발과-2552, 2015.7.22.)

- 하자보수기간 : 5년 이상.

❍ 발주 계획

- 교통안전표지 지주 설치, 감리용역 : 소액수의계약

- 태양광 LED 교통안전표지 : 관급자재 구매

(※ 교통신기술 지정, 조달우수제품 ‘태양광 LED 교통안전표지’(700mm×1190mm) 제품 구매)

❍ 공사기간 : 2016. 11. ~ 12. 까지.  끝.