서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)시아플랜건축사사무소 대표 조주환
(경유)
제목	용역 계약사항 변경 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 계약 체결하여 용역수행중인 「남산 예장자락 재생사업 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 계약사항을 변경코자하오니 이견이 없을 시 붙임 양식에 의거 합의각서를 제출하여 주시고, 변경계약 등의 후속조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 계약 변경사항

구 분	당 초	변 경	증 · 감
용역내용	‣공원‧주차장 설계 ‣측량,지반조사,모형제작	‣공원‧주차장 설계 ‣측량,지반조사,모형제작 ‣백서제작,전문가자문비
용 역 비	1,540백만원	1,590백만원	증) 50백만원
용역기간	’16.4.8~’16.12.3	’16.4.8~’17.3.31	증) 118일

붙임 : 합의각서(양식) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배현경		특화공간조성팀장	안중욱		공공재생과장	11/03 홍선기
협조자
시행	공공재생과-10988	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	대시민공개