문서번호	도로과-16779		주무관		도로굴착팀장		도로과장		안전건설교통국장
			이성우		오경록		최석훈		전결 11/04 김해성
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
			협 조

2016년 관내 불량맨홀 정비공사 설계변경 보고

안전건설교통국

(도로과)

2016년 관내 불량맨홀 정비공사 설계변경 보고

『2016년 관내 불량맨홀 정비공사』시공물량 증감에 따른 설계변경을 실시하여 사업추진에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 공 사 명 : 2016년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2016. 6.13.∼2013.12.31.

□ 공사내용 : 불량맨홀정비 39개소

□ 계 약 자 : 삼서건설(주) 대표 나남열

□ 계약금액 : 24,843,010원

Ⅱ		설 계 변 경 검 토

□ 주요 설계변경 현황

구 분	규격	단위	물량변경 내역			비고
			당초	변경	증감
계		개소	39	33	감 6
하수	D=648㎜	개소	6	11	증 5
상수	D=648㎜	개소	5	14	증 1
하수, 상수, 통신	D=766㎜	개소	5	6	증 1
통신, 전기	D=918㎜	개소	5	0	감 5
전기, 통신	1,080㎜×580㎜	개소	5	1	감 4
특수소형		개소	13	1	감 12

○ 설계변경 사유 : 시공물량(내역) 변경에 따른 설계변경

□ 도급액 증감 여부 : 증감없음

□ 기타 검토사항

○ 일상감사대상 여부 : 비대상

- 설계변경 2천만 원 이상 증감 : 해당없음

- 계약금액(도급비) 10%이상 증감 : 해당없음

- 주요 공법 변경 : 해당없음

○ 계약심사 제외대상 여부 : 대상

- 계약금액 3억 원 미만인 설계변경 대상 공사

○ 설계변경심의위원회 심사 여부 : 비대상

- 총공사비 3억 원 미만 계약금액 대비 20%이상 증감 : 해당없음

○ 재비율 검증 : 과다산출액 없음

- 검증확인서 : “별첨“

Ⅲ		보고자 의견

□ 본 공사는 일상감사, 계약심사 및 설계변경심의위원회 심사 비대상 사업으로 재비율 검증 시 과다산출액이 없으므로 예비준공검사 시행 후 준공처리하고,

□ 안전치수과 및 유관기관에 불량맨홀 정비비를 부과·징수하고자 함

Ⅳ		향후계획

□ 2016. 11. : 예비준공검사 시행

□ 2016. 11. : 공사준공

□ 2016. 11. : 불량맨홀 정비비 부과·징수

붙임 1. 변경설계서 1부.

2. 재비율검증서 1부.  끝.