문서번호	기반시설과-4623
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
조운행		박일연	11/04 박상돈
협조

서부이촌동 보행육교 설치공사 건설사업관리용역

- 분야별기술자(토목,기계) 배치 조정 -

2016. 11.

기반시설과

서부이촌동 보행육교 설치 건설사업관리용역

- 분야별기술자 배치 조정 -

「서부이촌동 보행육교 설치공사」의 건설사업관리책임자로부터 현장 공사여건에 따른 분야별기술자 조정(안)에 대한 검토 보고 드림

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 서부이촌동 보행육교 설치공사 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : '16. 8. 25 ~ '17. 7. 20

❍ 과업대상 : 보행육교 B=4m, L=50.4m, 승강기(15인) 2대

❍ 용역금액 : 264,000천원

******************************

보 고 내 용

▢ 관련근거 : 서부감리 제2016-36호************

“분야별기술자 배치 조정(안)”

▢ 변경조정(안) : 계약금액 및 용역기간 변경없음

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
책임기술자(고급)	11.0개월	11.0개월	변동없음
분야별(기계/중급)	4.0개월	2.5개월	감) 1.5
분야별(토목/초급)	7.0개월	9.0개월	증) 2.0

구 분	2016년								2017년										비 고
	8		9	10		11		12	1	2		3		4	5	6	7
책임기술자(고급)																			변동없음
분야별(기계/중급)																			감)1.5개월
분야별(토목/초급)																			증)2.0개월

▢ 건설사업관리자 의견

❍ 현장 여건에 맞추어 분야별기술자(기계/토목) 투입기간 조정함

- 상부(강판) 제작 기간 단축에 따른 기계 기술자 투입기간 단축

- 현장 공정에 따라 토목기술자 근무기간 조정

검 토 의 견

❍ 제출된 분야별기술자 조정(안) 건에 대하여는

▸ 상부(강판) 제작기간이 단축되어 기계기술자 투입기간 축소

- (당초) 4개월→ 2.5개월  : 1.5개월 단축

‣ 현재 기초말뚝 공사중으로 후속 공종(콘크리트 구조물 등)에 대한 분야별기술자(토목) 기간조정(증가)이 필요함

- (당초) 7개월→ 9개월  : 2.0개월 증가

- (당초 투입기간)  ‘16.08.25~11.25⇒ 08.25~12.31

‘17.03.20~07.20⇒ 03.01~07.20

❍ 상기와 같이 후속공종의 품질 및 안전관리 등을 위하여 분야별기술자(토목)배치를 조정하고 이후 현장 여건 변동시 실정산 처리 하고자 합니다(계약금액 및 준공일 변동없음).

붙임 : 실정보고 공문 1부.  끝.