투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행 - 2016년 노후포장도로 정비공사(2구역)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 노후포장도로 정비공사(2구역) 』 에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 정비공사(2구역)

나. 공사기간 : 2016. 04. 29~ 2016. 11. 30

다. 계약금액 : *************

라. **********************

마. 설계변경사유

○ 2016년 노후 포장정비 구간 측구정비 추가 반영(신규공종발생)

○ 상반기 시행구간 공종별 물량증감

○ 하반기 노후포장정비 추가예산 재배정, 집행잔액사용 등 하반기

공사계획에 따른 추가 물량 반영(미끄럼방지포장 포함)

※ ‘16년 하반기 노후포장도로 정비계획 통보(도로관리과-4678, 2016.9.28.)                , ’16년 노호포장도로 정비공사 추가 재배정액(잽행잔액 포함)사용 및                    하반기 공사계획(도로보수과-4916, 2016.10.11)에 의거 정비물량 증가

바. 준공기한 연기(추가공사로 인한 절대공기 부족)

○ 당초 : 2016. 11. 30.  변경 : 2016. 12. 30

사. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	*************	*************	****************
도급비	***********	*************	**************
관급비	*************	*************	**************
이전비	**********	**********	*************

아. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 관련 방침서 1부.  끝.

주무관	홍수종		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	11/07 이종엽
협조자
시행	도로보수과-5501	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	부분공개(5)