투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울대공원 입구숲(진입로) 조성공사 변경계약 의뢰

1. 조경과-3589(2016.7.11.)호와 관련입니다.

2.  『서울대공원 입구숲(진입로) 조성공사』 추진과 관련 아래와 같이 변경사항이 발생되어 변경계약 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 입구숲(진입로) 조성공사

나. 변경사항 : 준공기한 연기 및 계약금액 변경

다. 준공기한 연기 : (당초)2016.11.30. → (변경)2016.12.20.

- 귀책사유 : 서울대공원(지체상금 미부과)

라. 계약금액 변경 : (당초)금512,094,000원 → (변경)금602,063,000원

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		609,443,420	639,017,820	29,574,400
도급액	공급가액	465,540,000	547,330,000	81,790,000
	부가가치세	46,554,000	54,733,000	8,179,000
	계	512,094,000	602,063,000	89,969,000
관급자재비		97,349,420	36,954,820	-60,394,600

마. 도 급 사 : ㈜효승종합개발 정은정

바. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임  1. 방침서 및 설계서 각 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

								서울대공원장
주무관							조진성				주무관					강금완					조경과장					11/07 代강금완
협조자				계약1팀장							조현
시행			조경과-5644										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 (막계동)																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7511							/전송			02-500-7993					/	jsjo@seoul.go.kr													/	부분공개(7)