				★과장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-6809
보존기간		준영구		협 조			도로시설처장
결재일자		2016.10.04.					도로환경처장
공개여부		공개
『올림픽대로(방화대교~행주대교) 확장공사 관련』 시설물 인수 및 유지관리 계획 보고
			2016.
						도로관리본부

『올림픽대로(방화대교∼행주대교) 확장공사 관련』

시설물 인수 및 유지관리 계획 보고

□ 서울지방국토관리청에서 시행완료한『올림픽대로(방화대교∼행주대교) 확장공사』공사구간내 설치된 도로 및 시설물, 도로부속물 등 시설물 인수 및 향후 유지관리 계획에 대한 보고임.

Ⅰ				관련근거

❍ 市 도로시설과-11692호(‘16.9.29, 인수에 따른 유지관리 실시 알림)

Ⅱ				사업개요

❍ 사 업 명 : 올림픽대로(행주대교∼방화대교) 확장공사

❍ 총사업비 : 583억원 (시설비 540억원, 용지비 43억원)

❍ 공사기간 : 2009.2.24∼2013.12.31

❍ 발 주 처 : 서울지방국토관리청 도로공사과

❍ 자동차전용도로(올림픽대로) 인수대상 시설현황

- 도 로 : 올림픽대로 본선, L=2.67㎞, B=27∼34.4㎞(6∼8차로)

- 램 프 : 9개소, L=4.178㎞, B=7∼15.4㎞(1∼3차로)

- 교 량 : 6개소, L=675m (1,2종 3개소, 법정외 3개소)

- 옹 벽 : 6개소, 926m (법정외 6개소)

- 도로부속물 : 방음벽 L=586m, 방호울타리 L=11,285m,

충격흡수시설 8개소, 가로등 320등

- 교통관리(안전)시설 : 도로표지 36EA, 교통안전표지 42EA

- 기 타 : 녹지 93,725㎡, 수목 103,364주 등

❍ 전체 평면도

Ⅲ				추진경위

❍ ‘09.02 : 공사착공

❍ ‘13.12 : 공사준공

❍ ‘14.04 : 인수인계 요청에 따른 합동점검 실시

❍ ‘14.10 : 지적사항 조치결과 협의

❍ ‘15.09 : 지적사항 조치에 따른 인수인계 요청 (국토청→서울시)

❍ ‘15.12 : 인수인계를 위한 관리한계 구분 요청 (도로시설과→도로계획과)

- 일반시도 구간 및 자동차전용도로 구간 구분

❍ ‘16.01 : 인수인계 관련 회의(1차)

❍ ‘16.05 : 시설물 인수인계 요청 (국토청→서울시)

❍ ‘16.05 : 인수인계를 위한 관리한계 정리 (도로계획과→관련부서)

- 관련부서 : 도로시설과, 강서도로사업소, 한강사업본부

❍ ‘16.06 : 인수인계를 위한 추가 요청사항 알림 (도로시설과→국토부)

❍ ‘16.07 : 인수인계 관련 회의(2차)

❍ ‘16.08 : 준공시설물 인수인계 요청 (국토부→도로시설과)

	《 인수인계 과정 특이사항 》
◆ 해당 도로는 ‘13.12월 준공된 시설로 합동점검, 지적사항 보완, 부서간 관리한계 지정, 추가 요청사항 발생 등으로 준공 후 2년 넘게 인수 인계가 지연 되었으며, ◆ 최종 인수인계에 문제가 된 아래사항에 대하여 인수인계 검토회의시 서울시↔국토부간 협의를 통한 갈등해소 ➀ 정밀점검 시행주체 ➠ 국토부 회계상 올림픽대로 시설물 점검을 위한 예산편성 불가함에 따라, 정밀점검 지속요청시 인수인계 지연 및 관리공백 발생이 불가피함에 따라 조속히 인수조치 후 정밀점검 시행 ➁ 미납 전기료 정산 문제 ➠ 국토부 미납 전기료 정산 후 전기시설 명의변경

※ 공사준공 후 2년이상 시간경과 및 인수인계시 협의 미조치사항 등으로

공용기간 중 파손시설물 및 준설 등 긴급 일상정비 필요구간 예상

Ⅳ				시설물 유지관리 계획

❍ 부서별 인수 관리시설 현황

시설구분		대상시설	수 량	관리부서
총괄	도 로	소 계	6.849㎞	· 순찰 : 도로관리처 · 청소 : 도로환경처 · 시설물관리 : 부서별시행
		올림픽대로 본선	2.671㎞
		국도39호선 램프(2개소)	1.141㎞
		개화IC 램프(6개소)	2.717㎞
		방화 램프(1개소)	0.32㎞
시설물별구분	도로시설물	소계	12개소, L=1,600m	· 도로시설처
		Steel Box 교량(4개소)	총 L=610m
		PSC 교량(2개소)	총 L=65m
		보강토 옹벽(5개소)	L=541m
		침수방지 옹벽(1개소)	L=385m, H=3∼5.5m
	도로부속물	방음벽	L=586m, H=3.5m	· 도로관리처
		방호울타리	L=11,285.5m
		충격흡수시설	8EA
	교통관리시설	도로표지	36EA	· 도로관리처
	교통안전시설	교통안전표지	42EA	· 도로관리처
	교통안전 도로부속물	델리네이터	719EA	· 도로관리처
		시선유도봉	696EA
		도로표지병	263EA
	녹지시설	녹 지	93,725.7㎡	· 도로환경처
		수 목	103,364주
	기전시설	가로등	272본 320등	· 도로시설처
		분전반	9면

❍ 시설물 안전(정밀)점검 및 진단, 하자검사 : 시설물관리 부서별 시행

- 교량시설물 6개소 정밀점검 : ‘16년내 도로시설처 용역발주 시행(예정)

❍ 기전시설 미납전기료 (국토부)정산확인 및 명의변경 : 도로시설처(기전팀)

❍ 시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 온통시스템 입력(국토부 시행) 확인 :

도로시설처(구조물2팀)

❍ 도로관리시스템(RMS) 등록 : 시설물관리 부서별 시행

Ⅴ				향후계획

❍ 인수관련 이관서류 수령 : 도로관리처(시설팀) 총괄 ➠ 부서별 배포

❍ 시설물별 종합현황 등 데이터관리 : 시설물관리 부서별 시행

❍ 본 방침에 결재일로부터 부서별 시설물 관리시행

❍ 인수 후 긴급 시설정비 : 시설물관리 부서별 시행

- 공용기간 중 파손된 시설물보수, 준설 등 긴급 일상정비 필요사항

시설물개선 등 유지관리에 필요한 사항 등

붙 임  1. 시설물 인수인계서 1부.

2. 행주IC 평면분할도(도로 및 녹지) 1부.  끝.