문서번호	시설보수과-9582
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이동섭		김지환	11/14 신동헌
협조

일상유지보수공사 관급자재(아스콘) 추가구매 계획

2016. 11

서부도로사업소

(시설보수과)

일상유지보수공사 관급자재(아스콘) 추가구매 계획

우리 사업소에서 시행하는 「2016년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사」와 관련하여 ‘15년 정밀점검용역 1순위 지적사항인 이태원지하차도 포장보수를 위한 관급자재(아스콘)를 추가 구매코자 함.

□ 관련근거

◦ 시설보수과-9542(‘16.11.14), 일상유지보수공사 낙찰차액 사용계획

◦ 시설보수과-5253(‘26.6.27), ‘16년 하반기 일상유지보수 정비계획

□ 관급자재(아스콘) 사용 현황

구 분	최초 구매량	사용량	잔 량
물 량	1,598톤	1,444톤	154톤
금 액	80,958천원	73,156천원	7,802천원

◦ 1차작업(홍제천5복개 포장보수) : 43톤

◦ 2차작업(성산지하차도 외 3개소 소규모 포장보수) : 77톤

◦ 4차작업(서빙고지하차도 포장보수) : 572톤

◦ 5차작업(욱천2복개 외 3개소 소규모 포장보수) : 108톤

◦ 7차작업(의주로지하차도 포장보수) : 212톤

◦ 8차작업(월드컵터널 포장보수) : 366톤

◦ 11차작업(홍제천5복개 보도 포장보수) : 66톤

□ 아스콘 추가구매 계획

◦ 소요량 검토

- ‘15년 이태원지하차도 정밀점검 1순위 지적사항인 도로 포장보수를 위하여 아스콘 592톤이 소요될 것으로 예상되나, 현재 잔량 154톤으로 438톤 추가 구매가 필요한 실정이며,

- 추후 정기점검, 민원 등 발생 시 소규모 포장보수 조치를 위하여 약 100톤의 아스콘을 예비 확보코자 함.

◦ 아스콘 추가 구매

- 구매물량 : 538톤

- 소요금액 : 27,456,340원 (낙찰차액 사용)

· 자재비 : 27,308,880원 (538톤 × 50,760원/톤)

· 조달수수료 : 147,460원 (0.54%)

- 구매방법 : 나라장터 종합쇼핑몰 3자단가 구매 (경기북부아스콘조합)

□ 조치의견

◦ 상기 보고 내용과 같이 이태원지하차도 포장보수 및 소규모 포장보수 예비에 필요한 아스콘을 추가 구매코자 하며,

◦ 추후 일상유지보수공사 작업완료에 따른 설계물량에 의거 정산하여 수량변경 및 검수 조치하고자 함.

□ 향후 추진일정

◦ ‘16. 11 ~ 12월 : 이태원지하차도 포장보수 (12차 작업지시)

◦ ‘16. 12월중 : 아스콘 물량정산 및 자재검수.  끝.