투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시립노원시각장애인 복지관 재건축공사 계약변경(총차 및 1차) 의뢰

1. 도시기반시설본부 건축부-3137호(2014.03.13)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 발주하여 시행중인「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경(총차 및 1차) 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사

나. 대지위치 : 노원구 덕릉동 70가길 98(노원구 상계동 771번지)

다. 건축규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,752.84㎡, 노유자시설(사회복지시설)

라. 공사기간 : 총차-’13.01.02~’14.07.01(1차 - ’13.01.02~’14.05.16)

마. 계약금액 : 총차-2,721,374천원(1차–2,204,846천원)

바. 계 약 자 : 천마산건설(주)외 1개사

사. 계약변경 현황(총차 및 1차)

○ 변경사유

- 운영자 요청에 의한 외벽 자재 변경 등

- 지하층, 지상2~4층 층고 조정 등

○ 총차 및 1차 계약금액 변경내용                          (단위:원)

구 분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	공사기간	비 고
총 차	2,721,374,000	2,982,036,000	260,662,000	‘13.01.02～’14.07.01	금액변경
1 차	2,204,846,000	2,463,587,500	258,741,500	‘13.01.02～’14.05.16	공 사 중
2차(장래분)	516,528,000	518,448,500	1,920,500	‘14.05.17～’14.07.01	장 래 분

※ 예산과목 : 분야)복지건강실 장애인자립지원과, 정책)장애인자립생활기반조성,

단위)장애인복지시설확충, 세부)장애인복지관기능보강, 편성목)시설비                            및 부대비, 통계목)시설비(401-01)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 총차 및 1차 산출내역서(당초, 변경) 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정재흥		복지시설과장	조영수		건축부장	03/14 이병석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-3180	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2652	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	대시민공개