문서번호	기전과-9182
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	11/16 이종엽
협조

『도로교통소통 개선사업 교통신호기공사』

송정, 건영아파트앞 외 1개소 실정 검토보고

2016. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

『도로교통소통 개선사업 교통신호기공사』

송정, 건영아파트앞 외 1개소 실정 검토보고

『도로교통소통 개선사업 교통신호기공사(송정, 건영아파트앞 외 1개소)』의 현장 실정보고가 접수되어 검토 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ ㈜트래픽스 TR-개선-1127호(2016.11.10.)

→교통신호기 공사-송정건영아파트앞 외 1개소 현장실정보고서 제출

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 도로교통소통 개선사업 교통신호기공사(송정건영아파트앞 외1개소)

○ 계약자 : ㈜기전사 대표 김민호

○ 계약금액 : ****************************

○ 계약기간 : 2016. 09. 30. ∼ 2016. 11. 20.

○ 감 리 원 : 책임감리원 장지용

Ⅲ

실정보고 현황

○ 공기연장

- 관련근거 : 성동구청 토목과-12985호(2016.11.04.)

당 초	변 경 후	비 고
2016.09.30. ∼ 2016.11.20.	2016.09.30. ∼ 2017.10.20.	성동구청 토목과 착공 연기로 인한 공시기간 변경

○ 금액변경                                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	비 고
송정건영아파트앞	**********	**********	******************
옥수리버젠아파트 앞	**********	**********	******************** ****************** *****************
합 계	**********	**********	************

Ⅳ

검 토 결 과

○ 도로교통소통 개선사업 교통신호기공사(송정건영아파트앞 외 1개소)의 실정보고를 검토한 결과 실정보고에 관한 물량변경 및 공기연장을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 송정, 건영아파트앞 외 1개소 교통신호기공사 실정보고 1부.  끝.