“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(철산교 확장 외 1개소 타당성조사 및 기본계획 용역)

우리과에서 시행 중인「철산교 확장 외 1개소 타당성조사 및 기본계획 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 철산교 확장 외 1개소 타당성조사 및 기본계획 용역

나. 계약자 : 에이스톤엔지니어링(주)

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2016. 11. 26

- 변 경 : 2017.  2. 26

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : G밸리 교통종합개선계획과 연계검토, 철산교 및 수출의 다리 인접노선에 대한 접속계획 추가대안 검토 등을 위한 준공기한 연기 필요

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	김대희		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	11/17 하종현
협조자
시행	도로계획과-16596	(		)	접수		(		)
우	04524		/
전화	02-2133-8078	/전송	02-2133-0763	/	kdhlife@seoul.go.kr	/	대시민공개