준공기한 연기사유서

1. 용역 개요

용 역 명 : 대치동 가로공원 조성공사 실시설계용역

용역기간 : 2016. 09. 21 ~ 2016. 11. 19

용역개요

- 대치동 단대부고옆 이면도로 녹지 쉼터 조성

도 급 비 : 금17,000,000원

계약업체 : ㈜ 송림원   대표 임상규

2. 준공기한 연기사유

연기사유

- 주민건의 및 민원사항 반영, 공법 등 검토 등 절대공기 부족

준공기한 연기

계약일자	당 초	변 경
2016. 09. 20	2016. 09. 21 ~ 11. 19	2016. 09. 21 ~ 11. 30

연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)

지체상금 부과여부 : 미부과

2016.  11.

작성자 : 지방공업주사보   윤 영 문(인)

확인자 : 공원녹지과장     한 정 훈(인)