문서번호	도시철도토목부-14571
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
안태현		윤방식	11/22 김진팔
협 조
	주무관			김용선
	주무관			엄상민

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

예비준공검사 결과보고(7차)

2016. 11

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

예비 준공검사 결과 보고(7차)

지하철9호선 3단계 922공구 7차공사에 대한 준공 기한내 공사 완공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		공사 개요

○ 사 업 명 : 서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사

○ 사업규모 : 총연장 1,470m

- 본선1,305m, 정거장1개소

○ 사업기간 : ‘10.09.16 ~ ‘16.12.31

○ 사 업 비 : 132,030백만원

○ 계 약 자 : ㈜대우건설 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

2		예비준공 검사 현황

○ 일    시 : ‘16.11.10(수)

○ 장    소 : 922공구 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자 : 도시철도토목부 유원하, 조태현

○ 예비준공검사 입회자

- 감리단

· 기술지원건설사업기술자(구조분야 : 이병로, · 토질분야 : 이길용)

· 책임감리원 : 신정묵

- 현장대리인 : 장문석

3		7차공사 추진현황

○ 공사기간 : ‘16.03.17 ~ ‘16.12.31

○ 계약금액 : 금13,440백만원

○ 공 정 율 : 48.7%

○ 7차공사 추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약	실 적	잔 량	비 고
금 액	13,440	6,550	6,890

○ 7차공사 시공 및 미시공 현황                           (단위 : 백만원)

구 간		공 종	단위	7차공사 계 약		7차공사 시 공		7차공사 잔 여		조치계획
				계약수량	금액	시공량	금액	잔량	금액
937 정거장		토 공	㎥	8,008	446	8,008	446
		복공판	㎡	749	118	749	118
		버팀보	본	115	746	115	746
		H-pile박기	본	95	261	95	261
		상수관복구공	m	1,141	512	935	425	206	87	12/20 완료예정
		구조물	㎥	3,700	1,008	2,262	425	1,438	583	12/24 완료예정
본선 환기구	936S2E2	구조물설치	㎥	923	241	923	241
	937S1E1	구조물설치	㎥	1,926	514	1,287	354	639	160	12/22 완료예정
본선집수정		구 조 물	㎥	957	337	691	183	266	154	12/10 완료예정
토 목 계			식		4,183		3,199		984
건 축			식		1,204		107		1,097	12/16 완료예정
기 계			식		2,684		554		2,130	12/16 완료예정
전 기			식		895		273		622	12/18 완료예정
직접공사비			식		8,966		4,133		4,833
이 설 비					293		293
간접공사비					2,985		1,552		1,433
물가변동(1,2,3회)					1,196		572		624
도급비					13,440		6,550		6,890

4		예비준공검사 결과 및 조치계획

○ 7차공사 예비준공검사 결과 조속한 시일내에 토목 및 기타분야 공종변경 조정하여 잔여공사분에 차질 없도록 하고,

○ 예비준공검사일 현재 잔여물량에 대하여 책임감리사 ㈜선진엔지니어링 으로 하여금 준공일 이전에 공사가 완료토록 조치코자 함.

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.