총사업비 조정결과

2016. 11.

기 획 재 정 부

예산실

국토교통부

(‘16. 11.)

【하남선(5호선연장) 복선전철 건설사업】

(단위 : 백만원)

구 분	당초 (A)	순증액		조정후 (A+B)	조정 내용
		요구	조정 (B)
<총사업비>	986,833	61,433	36,423	1,023,256
1. 공 사 비	827,157	51,350	32,619	859,776
① 노 반	543,362	-		543,362
② 궤 도	22,879	1,773	△521	22,358
③ 건 축	115,077	-		115,077
④ 전 기	59,101	10,033	6,516	65,617	․법적의무시설은 상세설계후 조정 미반영
⑤ 신 호	9,197	14,479	12,449	21,646	․차상신호 변경, 전자연동장치 확장 등
⑥ 통 신	17,608	3,733	2,237	19,845	․열차무선시스템 변경, 공간화상설비 제외 등
⑦ 차량기지	59,933	21,332	11,938	71,871	․종합사령실 통신 개량, 기존차량 통신 개량(노선연장 비율) 등
2. 보상비	36,539	-	-	36,539
3. 시설부대경비	79,994	7,903	3,804	83,798
① 설계비	34,864	1,869	994	35,858	․요율적용
② 감리비	33,291	5,941	2,749	36,040	〃
③ 시설부대비	11,839	93	61	11,900	〃
4. 차량구입비	43,143	2,180	-	43,143