【별 첨 1】

설계변경 심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

방재시설부

담당 이 석 근

요청일

2016년 11월   일

공 사 명

신상도 지하차도 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장 2차로→4~6차로, L=324m

(지하차도 확장 2차로→4차로, L=230m)

공사기간

2007. 12. 31.  ~  2018. 12. 31.

감 리 사

미 발주

설 계 사

유신코퍼레이션

시 공 사

(유)한백종합건설, 구민종합건설(주)

자문 안건명

포스코(더샾)아파트측 진입로 공사

요청금액

193,204천원

자문요청사유

▢ 10억 이상 변경사항

☑ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

〈설계변경사항(요약)〉

- 본 사업은 2007.12.31. 계약 및 착공된 공사로서 상도7구역 재개발사업 지연에 따른 대체부지(기부)

미확보로 2016.11현재까지 지하차도 확장공사 추진이 되지 않고 있으며, 2017년 인근빌라 보상 후

2018년부터 본격적인 사업을 추진할 예정으로,

- 지하차도 시점부 포스코아파트 진입부 부적절한 도로선형을 정비하여 지역주민 보행 및 통행차량의

불편을 해소하기 위해 시행하는 일부 공사로서 교통규제심의결과를 반영함에 따라 신규항목, 수량

증·감으로 인한 설계변경

〈원설계자 의견(요약)〉

-민원 사항에 대해서 조치로 본 공사 착수 지연됨에 따라 일부구간 정비가 적정함.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 진입로 확장 민원 해결 결과에 따른 공사비         증.감 사항

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :  불임

- 변 경 :  붙임

- 증 감 :  붙임

▪ 공사비 증감내역                       (단위 : 원)

구분	총 괄	5 차분
당초	11,762,278,000	61,435,000
변경	11,955,482,000	254,639,000
증·감	(증)193,204,000	(증)193,204,000

▪ 설계변경 주요 공종

- 포스코아파트측 진입로공사

(보도Set-back, 차로확보 등)

- 보완설계비 반영

별첨서류

1. 설계(변경)내역서 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신상도 지하차도 확장공사
계약금액	11,762,278천원	계약일	2007. 12. 28.	시공사	(유)한백종합건설 외 1개사
공사기간	2007.12.31. ~ 2018.12.31	낙찰율	81.218%	설계자	유신코퍼레이션
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	미발주
공사규모	도로확장 2차로→4~6차로, L=324m (지하차도 확장 2차로→4차로, L=230m)			※작성자: 업무담당 이 석 근 (☎02-3708-8765)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증 / 감
변 경 개 요	-		보도Set-back후 차로확보 대채도로 보완설계 등
공 사 비	11,762,278천원		11,955,482천원	증 193,204천원
적 용 요 율	기 계약		81.218%	-
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협 의 율 적용근거	81.218%
설계변경 근 거	방 침	실정보고 승인 (방재시설부-10896 2016.7.13.외 3건)
	관련규정	공사계약특수조건 제12조, 13조
설계변경 유 형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내 용	더샆아파트 진입부의 불합리한 도로선형을 개선하기 위해 차로확장(보도Set-back)을 하는 공사로서 신규항목, 수량 및 공사비 증·감 사항에 대한 설계변경임.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 방재안전시설부 2016

방재시설부-10896(2016.07.13.), -13251(2016.08.24.), -15866(2016.09.20.), -17549(2016.11.09.)