투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 조건부 승인통보-가설방음벽, EGI휀스 설치기한 연장)

1.업무지시현장 :  경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2016-11-23 17:11:26

3.지 시 내 용:

(1) 선진경춘감-16-792(2016.11.14.)호와 관련입니다.

(2) 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계) 가설방음벽, 가설휀스 설치기한 연장 실정보고에 대하여 아래와 같이 조건부 승인 통보하니 업무에 참조하시기 바랍니다.

■ 조건부 승인 내용

- EGI 휀스는 당초 설치기간을 기점으로 철거 시까지의 기한 산정하여 손율 재 산정               후 설계변경에 반영 할 것.

- 가설방음벽 및 EGI휀스는 실 설치기간으로 정산 후 설계변경에 반영할 것.

- 가설방음벽(사인물부착) 의 사인물 실 견적서는 설계변경 서류에 첨부 제출 할 것.

- 공사 준공 후 존치 EGI휀스 발생 시 관리 방안 수립 할 것.

- 향후 실정보고 제출 시 오류사항 재차 확인 후 제출 요망.  끝.

주무관							박계현			공원시설과장					김인숙					방재시설부장					11/25 임춘근
협조자
시행			방재시설부-18564									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부															/
전화		3708-8684						/전송			3708-8756					/													/	대시민공개