문서번호	도시철도설비부-13091
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	송변전과장	도시철도설비부장		도시철도국장
조대근	박동규	정찬웅		11/25 이정화
협 조
	경리과장		최정수

『지하철9호선 3단계 개화차량기지 유치선 증설 전차선공사』

준공기한 연기 검토 보고

2016. 11

도시기반시설본부

【도시철도설비부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『지하철9호선 3단계 개화차량기지 유치선 증설 전차선공사』

준공기한 연기 검토보고

『서울지하철9호선 3단계 개화차량기지 전차선공사』추진과 관련, 감리단으로부터 준공기간 연장요청이 있어 아래와 같이 검토․보고 드림. ※ 세종기술(주) 개화전감 제2016-106호(2016.11.23.)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계  개화차량기지 전차선공사(1차)

○ 용역금액 : 금3,044,278,367원

○ 용역기간 : 2016.01.11.~2017.01.09.(착공일로부터 365일)

○ 계 약 자 : ㈜기전사(대표자:임만심)

2		보고내용

○ 준공기간 연기 요청

구 분	당 초	변 경	사 유
용역기간	2016.01.11 ~ 2017.01.09.	2016.01.11 ~ 2017.04.30.	○ 철도종합시험운행 일정 확정 - 당초 : 없음 - 변경 : 2017.04 중 완료 (예정) ○ 지체상금 미부과

3		책임감리원 검토의견

○ 필 요 성

지하철 9호선 3단계 개화차량기지 전차선공사 준공기한 연장요청에 대하여 검토한 결과, 철도종합시험운행 추진일정이 (당초) 본 과업에 반영되어 있지 않았으나, 운영부서와 차량반입계획 검토과정에서 우리 시의 필요에 의거 2017. 04월까지 추진하는 것으로 결정됨에 따라 전차선공사의 공기연장이 불가피한 것으로 판단됨.

○ 연장일정 검토

- 당초 : 2017.01.09.

- 변경 : 2017.04.30.(111일 연장)

○ 귀책사유 검토

철도종합시험운행 일정 협의에 따른 사항으로 지체상금 미부과

4		검토의견

○ 감리단 검토의견에 의거 공기연장 후 철도종합시험운행 정상추진

5		조치계획

○ 건설총괄부에 계약변경 의뢰 시행

- 요청내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2016.01.11 ~ 2017.01.09	2016.01.11 ~ 2017.04.30	○ 계약금액 변경 없음

□ 붙 임 : 1. 책임감리원 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기원. 1부. 끝.