문서번호	기전과-12919
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
심예선		전결 11/28 양영민
협조

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부도로사업소

(기전과)

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고(2차)

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업의 교통신호기 공사 업무수행 중에 감리업체가 제출한 실정보고(2차)에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 - 서부 현장실정(2차) 보고서 제출 건

- 문서번호 ㈜트래픽스 TR-개선-1119(2016.11.24.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치: 남영동교차로 외 1개소

○ 공사내용: 신호기 신설·이설 및 위치조정 1식

○ 계약금액: 123,964,600원

○ 공사기간: 2016.4.29. ∼ 2016.12.10.

○ 계약업체: ㈜창희이엔에스 대표 임창우

○ 감리업체: ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액 : 증 6,500천원

○ 세부내역

- 응암초교: 증 6,500천원

․육교 미철거로 제어기 신설하여 연동분리

․케이블의 가닥수가 많고 서울시 지침에 의거 1.5SQ/5C로 변경

[교통운영과-6905호(2016.4.15.)]

․노후된 흑관지주 추가교체

․횡단보도 변경에 따른 지주위치 변경설치

※ 붙임 현장실정보고서 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에 따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙 임: 감리업체 현장실정보고서 1부.  끝.