문서번호	도로보수과-5951
결재일자	2016.11.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
홍수종		11/29 이상호
협 조

2016년 노후포장도로 노면표시 감리용역

준공기한 연기 검토보고

2016. 11.

성동도로사업소

도로보수과

2016년 노후포장도로 노면표시 감리용역

준공기한 연기 검토보고

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 노면표시 감리용역

○ ******************

○ 공사기간 : 2016. 4.25 ~ 2016. 11. 30

○ 공사규모 : 노면표시 감리용역 1식

○ **********************

▢ 준공기한 연기 사유

○ 2016년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사 준공기한 연기(201.12.30)와 관련 노면표시 감리용역 준공기한 연기 필요

▢ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 노면표시 보수공사 공기연장에 따른 감리용역 수행이 불가피하여 준공기한 연기 조치코자 함.

*********************************************

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 귀책사유 : 성동도로사업소

▢ 향후계획

○ 용역 준공 : 2016. 12. 30

붙임 : 준공기한 연기 요청서류 1부.  끝.