“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	양재고개 녹지연결로 조성 설계공모 추진계획 통보

1. 자연생태과-21476(2016.11.29.)호와 관련입니다.

2. 단절된 녹지축 연결사업의 일환으로 추진중에 있는 양재고개 녹지연결로 조성사업에 대한 설계공모 계획을 붙임과 같이 통보하오니 추진 부서별로 본 사업이 원활히 진행 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 위    치 : 서초구 서초동 산30-18일대(양재고개)

2) 사업내용 : 녹지연결로(L100*B10m) 설치 및 수목식재 등

3) 추진기간 : 2015~2019년

4) 사 업 비 : 13,595백만원(공사비 11,675, 보상비 950, 설계비 등 970)

나. 추진일정

1) 2016.12~2017.04월 : 설계공모(자연생태과, 도시공간개선단)

2) 2017.05~2018.04월 : 기본 및 실시설계용역(도시기반시설본부)

3) 2018.05~2019.06월 : 공사시행(도시기반시설본부)

4) 2019.07월 준공이후 : 시설물 유지관리(서초구)

다. 행정사항

1) 도시공간개선단 : 설계공모 운영 전반에 대한 지원 및 추진

2) 도시기반시설본부 : 기본 및 실시설계 용역 및 공사추진

- 기본설계 추진 과정에서 서울시 투자심사 조건에 따라 2단계심사 절차 이행

3) 서초구

- 2단계 심사 절차 이행 후 공원조성계획변경 및 토지보상 등 제반 절차 이행

- 공사 후 구조물 및 조경부분에 대한 유지관리부서 지정 제출

붙  임 : 양재고개 녹지연결로 조성 설계공모 추진계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도시공간개선단장,서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서초구청장(공원녹지과장)
주무관	이정수		생태복원팀장	박경옥		자연생태과장	11/30 유영봉
협조자
시행	자연생태과-21539	(		)	접수		(		)
우	04520		/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2153	/전송	02-2133-1083	/	sangjs67@seoul.go.kr	/	대시민공개