투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경 계약 - 뚝섬,여의도 수영장 막구조 파고라 정밀점검 용역

1. 기반시설과-4961(2016.11.29.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 추진중인 ｢뚝섬,여의도 수영장 막구조 파고라 정밀점검 용역｣에 대해 아래와 같이 기간변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 기간변경 요청내역

구 분	변 경 내 용		비고
	당 초	변 경
용 역 비	19,489,000	변경없음
용역기간	‘2016.10.18.~12.04	‘2016.10.18.~12.20(증16일)

나. 변경사유 : 준공전 외부전문가 자문실시필요 및 조치기간 소요에 따른 변경

붙  임 : 변경요청 공문 각1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	11/30 박병현
협조자
시행	총무과-21183	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)