문서번호	시설과-6488
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
박지선	오삼록	나병우		12/01 송인호
협 조	총무과장		사창훈
	조사연구과장		정명아
	주무관		김해규
	주무관		김선화
	주무관		강상범

클라우드센터 서버이전 세부 추진계획

2016. 11

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

클라우드센터 서버이전 세부 추진계획

우리 박물관의 정보시스템들이 탑재되어 운영중인 주요 서버의 클라우드센터 이전과 관련하여 세부 추진계획을 수립함으로써 안정적이고 효율적인 서버이전을 수행하고자 함

1		정보화 현황

❍ 정보시스템 운영현황

연번	시스템	주요내용	도입년도
1	홈페이지 및 통합관리	국․영․중․일, 모바일웹, 어린이, 청계천, 통합관리자시스템 등	2002
2	디지털아카이브	아카이브 자료관리 및 홈페이지 서비스	2011
3	서울역사유물관리	유물관련 업무 정보화	2012
4	한양도성 앱 및 순성웹	한양도성 영상 및 지도, 길안내 등	2013
5	사이버박물관	박물관 전시장 촬영보존 및 가상전시서비스	2009
6	관람객 집계	관람객 계수(본관,백인제가,군기시전시실)	2013
7	주차장요금관리	차량번호 인식 및 요금계산	2010
8	대량메일	전시․교육․행사 등 홍보 메일발송	2003
9	PC개인정보시스템	개인정보파일 검색 및 암호화	2013
10	보안USB관리	행정망 업무자료 유출방지	2011

※ 그 외, 책임운영기관, 교육강사관리 등이 있으며 영상관련 시스템은 제외함.

❍ 전산 시설 및 장비 현황

- 전산실(1층) : 26평 (서버실 14평, 사무실 12평)

- 전산장비 : 서버 10대, 스토리지 10대

- ******************************

- **************************************

작 성 자	경영지원부장: 나병우 ☎ 724-0105 시설과장 : 오삼록 ☎ 0130 담당 : 박지선 ☎ 0136

- 부대장비 : 항온항습기 등 12대

2		그간 진행사항

❍ 서울시 클라우드 컴퓨팅 기반 사업 추진 계획(데이터센터, ‘14.10월)

❍ 서버이전관련 회의참석 : 총 5회 (‘14.3월, ‘15.6월,9월,12월, ‘16.8월)

❍ 박물관서버 이전대상 제출 : ‘15.2월

❍ 서울시 클라우드센터 입주 및 운영 기본계획 (데이터센터, ‘15.6.3)

❍ 클라우드센터 전산실 이전계획 (데이터센터, ‘16.1.14)

❍ 클라우드센터 서버이전 계약체결 등 (데이터센터)

- 계약체결 : ‘16.8월

- 클라우드센터 장비 구매․설치 및 통신환경 개통 : ‘16.10월

- 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과 서버 이전 : ‘16. 11월

❍ 서버이전 준비 : ‘16.8월 ~ 현재

- 이전 장비별 설치 프로그램 및 연계 정보, 환경설정 파악

- 데이터 사용현황 파악 및 데이터 정리

- 이전 장비 서버취약성 점검 및 조치 등

3		추진개요

□ 대 상 : 총 서버7대, 스토리지 2대, 시스템 S/W 2종

구 분	내 용	대 상
서버 이전	물리적 서버 이사	서버 4대
서버 이관	노후되어 신규서버로 교체 (프로그램 재설치 필요)	서버 3대
스토리지 및 S/W 이관	데이터 및 S/W 재설치	스토리지 2대, DBMS, 백업 S/W

□ 방 법 : 모의훈련실시 후 실제 이전수행

□ 일 정

❍ 모의훈련 : ‘16.12.  2(금) 20:00

❍ 실제이전 : ‘16.12.16(금) 20:00 ~ 12.17(토) 11:00 예정

※ 토요일 광화문일대 집회관계로 반출차량 진출입이 어려워 12.17(토)에서 변경

□ 소요비용 : 10,888천원

4		세부 이전․이관 계획

□ 업무 구분

❍ 클라우드센터 : 정보자원 인프라 관리

- 장비의 OS‧시스템 S/W‧DB‧관리 S/W 등 인프라 구축 및 유지관리

❍ 박  물  관 : 업무서비스 관리

- 업무용 프로그램(Application Program)의 운영관리‧신규개발

- AP 운영을 위한 미들웨어, 상용 S/W 운영관리

- 장비 이전 시, AP 변환이 필요한 경우 예산확보 및 프로그램 보완

□ 이전관련 작업 내용 및 주체

구 분	작업 내용	작업 주체 (비용부담)
서버 이전 (이사)	서버 Shutdown	박물관
	물리적 이동	데이터센터
	서버 Startup 서버 및 탑재 프로그램별 설정값 수정	박물관
서버 이관 (교체)	가상화 서버 준비	데이터센터
	시스템 S/W 설치 (OS, DB)	데이터센터
	프로그램 설치 - 미들웨어 설치(Was, Web server S/W) - 프로그램 설치(홈페이지, 유물관리 등) - 상용S/W 설치(통합검색, 대용량메일 등)	박물관
	데이터 이관
	- 데이터 사용현황 파악 및 정리	박물관
	- 데이터 백업 및 복사	데이터센터
	프로그램 서비스 확인 등 방화벽, 도메인 변경 연관 시스템의 연계상태 확인 등	박물관
스토리지, 시스템S/W 이관	데이터 사용현황 파악 및 정리	박물관
	데이터 백업 및 복사	데이터센터

□ 이전․이관 장비 상세내역

❍ 서버 및 스토리지

연번	구분	서버명	장비기종	도입년도	탑재 업무(AP)	탑재 상용S/W
*	* * ****	****	*********	****	****
*		****	*********	****	*******
*		***********	***********	****	**********	******
*		*****			*******
*	* * ****	****	***************	****	****	*******
*		***********	***************	****	****
*		******	************	****	****** **********	******* ******* *********
*		****	**************	****	*************
*		****	***************************	****	***********

※ 1. 박물관 서버 총 10대 중

- 이전서버 4대는 이전후 관리전환

- 이관서버 3대는 2대 폐기, 1대는 박물관 내부 활용

- 이외 3대는 내부 폐쇄망에서 동작중인 서버로 이전․이관대상에서 제외

2. 박물관 스토리지 총 10대 중

- 2대는 데이터만 이관후 1대는 폐기, 1대는 내부 활용

- 그 외 8대는 이동형 유물자료수집, 대용량 이미지 및 영상자료 보관용으로 이전․이관대상에서 제외

❍ 이관 시스템 S/W

연번	제조사	세부내역	도입년도	기 능
*	***	*******************	****	********
*	***	******************************	****	*****

□ 이관서버별 S/W 재설치 비용

(단위:원)

연번	서버	업무용 프로그램 및 상용 S/W	비 용	비고
*	****	**** *********************	*********
*		****	********	*******
*		*********	*********
*		***	*********
*	****	**** *********************	*********
*		*********	*********
*	****	****	**********	********************
*	****** *********	********* ********************	*********
*		****** **********************	*********
**		*********	**********	*************************************
**
		****	***********
**		*********	********
**		******	********	*******
			**********

※ 상용 S/W는 라이센스 정책(OS, 사이트, CPU 수, USER 수 등 기준 비용산정)에 의거,  재설치되는 신규서버의 스펙에 따른 라이센스 업그레이드 및 교체 필요.

□ 작업 일정

❍ 모의훈련 : ‘16.12. 2(금) 20:00 ~ 12. 3(토) 02:00 예상

- 이전 장비 중단, 백업, 가동

- 이관 장비는 신규 서버로의 설치 진행상황에 따라 서비스 확인

❍ 실제이전 : ‘16.12.16(금) 20:00 ~ 12.17(토) 11:00 예상

구 분	작업 세부 내용		주 체
사전준비	신규 서버에 AP설치 및 자료 이관 확인, DNS 설정 변경 신청, 서버 변경에 따른 DB 암호화 솔루션 등 SW 라이선스 확보 및 설치, DB서버 이중화 구성에 따른 AP 라이선스 추가 확보 등 연계기관에 변경된 ip 및 이전 일정 공지 등		박물관
이전일	서비스 중단	’16.12.16.(금) 20:10~20:40	박물관
	백업 실시	’16.12.16.(금) 20:40~22:10	박물관
	장비 중단	’16.12.16.(금) 22:10~22:40	박물관
	해제, 포장, 반출, 운송, 반입	’16.12.16.(금) 22:40~01:30	데이터센터
	장비 설치 및 환경설정	’16.12.17.(토) 01:30~05:30	데이터센터
	AP 환경설정 변경, 서비스 기동	’16.12.17.(토) 05:30~07:00	박물관
	서비스 오픈 및 확인	’16.12.17.(토) 07:00~08:00	박물관
	관리 SW 적용 및 사후작업	’16.12.17.(토) 08:00~11:00	데이터센터

5		소요예산

□ 소요예산 및 지출방법

❍ 소요예산 : 총 10,888천원

(단위:원)

연번	내 역	제조사	규 격	비 용
*	***********	*********	*****	********
*	*************	***	***************** ********************	**********
*	***************	*****	************** ****************	**********
*	************	****	************************ ****************	***********
*	**********	****	*****	********

❍ 지출방법 : 일반지출(건별 카드 결제 또는 계좌 입금 조치)

❍ 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 정보화, 일반운영비, 공공운영비

※ 클라우드센터 신규장비가 ‘16.10월 구매 설치됨에 따라 상용S/W 재설치비를 ’16년도 본예산에 편성하지 못하여 박물관정보화 사업의 낙찰사액을 사용코자함.

6		행정사항

□ 이관․이전 장비처리
❍ 박물관 이전 서버 4대에 대한 클라우드센터로의 관리전환(‘16.12월)

❍ 노후로 이관되고 남는 서버 3대중 2008년산 2대는 폐기, 2009년산 1대는 개발 및 테스트용으로 활용

❍ 데이터 이관 대상 스토리지중 2007년산 폐기, 2014년산은 박물관 내부 네트워크 스토리지로 활용

□ ‘17년도 서버 유지보수 수행방법

❍ 이전․이관되는 서버에 대한 유지보수 계약은 박물관에서 체결하고, 유지보수 업무는 클라우드센터에서 수행

❍ ‘18년부터는 본 서버들에 대한 유지보수 예산을 클라우드센터에서 확보

붙임  1. 이전 작업 시간표 1부.

2. 이전서버의 현황도 및 목표도 1부.  끝.

책임운영기관  성과지표  13. 정보시설 및 뉴미디어 운영