“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	2016년 버스정보안내단말기(BIT) 설치공사 감리용역 계약변경 및 준공기한 연기 의뢰

1. 교통정보과-19425(2016.11.29.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인 「2016년 버스정보안내단말기(BIT) 설치공사 감리용역」에 대하여 아래와 같이 계약변경 및 준공기한 연기를 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약개요

○ 계약건명 : 2016년 버스정보안내단말기(BIT) 설치공사 감리용역

○ 계약업체 : 합자회사 피이피그린

○ 계약금액 : 금사천팔백구십만팔천백원정(\48,908,800원)

○ 계약기간 : 2016. 06. 20. ~ 2016. 12. 22. (6개월)

나. 계약변경 및 준공기한 연기내역

○ 계약변경 및 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	금사천팔백구십만팔천팔백원정 ( \48,908,800원 )	금오천일백오십사만사천원정 ( \51,544,000원 )	증) 금이백육십삼만오천이백원정 ( 증) \2,635,200원 )
준공기한	2016.12.22.	2016.12.28.	준공기한 6일 연기

○ 계약변경 사유 : 감리대상 사업(2016 버스정보안내단말기 설치사업)의 버스정보안내단말기 설치 물량 증가로 준공기한 연기 필요

○ 예산조치 : 금이백육심삽만오천이백원정(\2,635,200원)

○ 예산과목 : 도시교통본부 교통정보과, 과학적 교통정보서비스구현, 과학적교통운영체계구축, 버스정보안내단말기(BIT) 설치, 감리비(202-401-02)

붙임 : 1. 계약변경 방침서. 1부.

2. 계약변경 산출내역서. 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서. 1부.

4. 계약연장 합의각서. 1부. 끝.

	교통정보과장
주무관	장석민		버스정보팀장	정윤식		교통정보과장	12/01 이경순
협조자
시행	교통정보과-19590	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동) 종로소방서 5층 서울시 교통정보과	/	http://topis.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4971	/전송	02-2133-4990	/		/	부분공개(5,6)