★

문서번호	교통지도과-32395
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개

담 당	주차단속담당	교통지도과장		안전건설교통국장
이승재	김흥규	임장식		12/07 박형중
협 조
	예산담당		고영용
	계약담당		이환규

불법주·정차 단속용 -
CCTV 설치사업 사고이월 계획

2016. 12.

안전건설교통국

(교통지도과)

불법 주·정차 단속용

불법주·정차 단속용 CCTV 설치사업을 2016년 회계연도 내에 완료하기 어려워 당해 사업을 2017년도로 사고이월하여 단속업무에 만전을 기하고자 함

CCTV 설치사업 사고이월 계획

Ⅰ	관련근거

2016년 불법주·정차 무인단속카메라(CCTV) 설치 및 변경계획

(교통지도과-28676, 2016. 10. 24.)

Ⅱ	추진개요

2016 회계연도 세출예산 사고이월 추진계획(기획예산과-15089, 2016. 12. 2.)

사업명 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치 및 성능개선, 문자알림서비스

추진목적

차량 소유자의 경각심 유발로 불법주·정차를 사전에 예방

위반차량을 단속함으로써 건전한 교통 질서 확립과 올바른 주·정차 문화 정착에 기여

추진기간 : 2016. 7. ∼ 2017. 2.

추진사업

구분	설치 장소
신규설치(4개소)	삼선교로28(희망의 다리 앞)
	안암로9길30(삼익아파트 앞 삼거리)
	정릉로322(소망약국 앞 교차로)
	길음로14(길음뉴타운 새마을금고 본점)
이전설치(1개소)	성북로5(한성대역 5번출구 앞)

CCTV 신규 설치(4곳), 이전 설치(1곳)

- 조달청 우수제품으로 설치

- 관제센터 상황실 운영 서버 설치

- 다기능 CCTV시스템(방범+주정차겸용)으로 운영의 효율성을 제고

- 사업예산 : 121,276,730원(계약금액+조달청 수수료)

노후화 CCTV 성능개선

구분	교체 대상
교체 (3개소)	북악산로852-1(맑은샘교회 앞)
	동소문로17길40(아리랑고개 에덴어린이집 앞)
	동소문로44길17(현대힐스테이트 앞)

- 교체방법 : 기존 폴대와 암에 고화질카메라 교체 설치

- 사업예산 : 19,671,610원(계약금액+조달청 수수료)

주정차위반 CCTV 단속 휴대폰 문자알림 시스템(클라이언트)

-      사업예산 : 신규설치 4개소 구매, 1,478,350원(계약금액+조달청 수수료)

Ⅲ	추진과정(신규 및 이전설치)

개인정보보호법시행령 제23조제1항에 따른 주민의견조사 및 행정예고(2016. 7. ∼ 11.)

업무협조 및 의견조회 요청 공문발송(2016. 8. ∼ 11.)

주택정책과, 주거정비과, 건축과, 교통행정과, 도시안전과, 도로과, 치수과

성북경찰서, 종암경찰서, 한국전력(강북지사), 통신사(LG유플러스)

계약의뢰 및 체결확인〔조달청 수의계약(총액계약) : 2016. 10. ∼ 11.〕

설계 및 공사시행(2016. 12. ∼ 2017. 1.)

문자알림시스템 연계 및 불법주·정차 금지 플래카드 게첨(2016. 12. ∼ 2017. 1.)

공사완료 및 단속시행(2017. 1. ∼ 2.)

Ⅳ	사고이월사유

CCTV 신규 설치(4곳), 이전 설치(1곳)

조달청 측의 계약건수 증가 등으로 인한 업무부담과 요청자료를 확보하는데 시간소요

설치예정장소 중 1곳인 성북동 일대의 주민의견 조사 중 설치위치에 대한 이견으로           새로운 장소 확보에 시간소요

불법주정차 단속용 CCTV는 방범전용 CCTV와는 달리 전용 프로그램의 설치가 필요하고 좀더            넓은 도로굴착범위와 재료 등의 선정에 있어서 전문성이 요구되므로 이에 따른 시간소요

노후화 CCTV 성능개선

2016년 12월31일까지 유지보수계약이 되어있는 점을 감안하여 1월에 설치예정

주정차위반 CCTV 단속 휴대폰 문자알림 시스템(클라이언트)

CCTV 신규설치 후에 문자알림시스템 연계 예정(1월)

Ⅴ	행정사항

사고이월 처리 : 기획예산과 예산팀 협조