과 업 지 시 서

사 업 명	관악어린이창작놀이터 사무실 확장 및 연구실 조성 공사
주관기관	서울문화재단

2016. 12.

소 속	담당자	전화번호	팩스번호
관악어린이창작놀이터	강지은	02-871-7414	02-871-7416

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 : 관악어린이창작놀이터 사무실 확장 및 연구실 조성 공사

2. 과업의 목적

1.1 공간의 사각지대 활용하여 사무실 확장 및 연구공간을 조성하여 관악어린이창작놀이터의 사업 운영에 만전을 기하고자 함.

3. 소요예산 : 一金팔백팔십일만사천칠백사십구원정(₩8,814,749 / VAT포함)

Ⅱ. 과업내용

1. 소 재 지 : 서울시 관악구 은천로 10길 3

2. 시공위치 : 2층 운영사무실 및 공방 일부

3. 시공내용

	구분	작업내용	공사·방법	면적(㎡)	비 고
1	철거공사	벽체철거	- 철거 전 시설물 보양을 철저히 한다. - 철거 폐기물은 1층 주차장에 집하 후 일괄 처리한다. - 철거 폐기물 이동시 쓰레기자루를 이용한다.	10m2	도면참조
2	벽체	칸막이공사	- 석고보드 2겹 시공을 하며 친환경페인트를 사용하여 마감한다.	44m2	도면참조
		창호공사	- 샷시 및 목재도어를 이용하여 시공한다. - 목재도어는 내부확인 가능한 유리창호를 설치한다.	창호:2set 도어:2set	도면참조
		도장공사	- 도장재료는 친환경제품으로 진행하며 도장작업 후 방염도장작업을 하여야 한다.	52m2	도면참조
		기존재활용 신규제작	- 철거 후 훼손부분은 보수 후 재설치 - 기존 선반과 동일한 재질과 규격 제작	4et 5et	기존선반참고
3	선반공사
4	수장공사	블라인드	- 방염 인증한 롤스크린을 시공한다.	2set	이미지 참조

4. 과업기간 : 계약일로부터 20일간

5. 하자담보책임기간 : 작업완료일로부터 1년

Ⅲ. 과업세부내용

1. 작업 전 안전준비 작업

1.1 작업 시 안전기본 수칙

가) 위험이 예상되는 작업에는 반드시 안전조치(안전모와 안전대, 안전화 등)를 강구 한 다음 작업에 임하여 하며 각종 사고 및 재해 예방에 만전을 기하여야 한다.

나) 규정에 맞는 작업복 및 보호구(안전모, 안전화 등) 착용하여야 한다.

다) 작업구역 내에 당해작업자 이외의 사람이 출입하는 것을 금한다.

라) 작업장소에 물건을 놓아두면 협소해지고 걸려 넘어지거나 물건이 덜어 재해의 원인이 되므로 가능하면 두지 않는다.

마) 작업자는 작업 중 고성방가, 음주, 폭행 등 보행자에게 피해가 되는 행위를 하여서는 아니되며 이의 위반시 작업자 교체 등 적절한 조치를 강구 하여야 한다.

바) 용역수행 중 계약상대자의 과실로 민가 또는 공공시설, 조경, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때는 계약자부담으로 원상복구 및 보상 등 적법한 조치를 취한다.

사) 공사현장에 공사안내 및 안전표지판을 설치하고 시행한다.

아) 차도와 인도는 차량 및 보행자들의 통행이 빈번하므로 교통 안전대책을 확보한 후 시공하여야 한다.

1.2 작업 전 준비사항

가) 작업복이나 보호구는 규정에 정해진 대로 착용한다.

나) 위험작업일 때는 감시자 및 작업수행의 지휘·감독체제를 확인한다.

다) 작업상, 작업위치, 주의사항을 확인한다.

라) 계약상대자는 현장대리인을 선임하고 현장대리인은 공사장에 상주하여 공사관리 등 공사업무에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

2. 철거공사

2.1. 일반 사항

가) 시공 전 보양재를 이용하여 시설물을 전체 보양한다.

나) 철거공사 중 발생되는 건축폐기물은 반드시 폐기물허가 업체를 통하여 반출한다.

다) 계약상대자는 폐기물관리법시행규칙 제6조 제1항에 의거 「폐기물의 수집․운반․보관․처리에 관한 구체적 기준 및 방법」을 준수하여 용역을 수행한다.

라) 공사를 시행함에 있어 시공 전, 후 사진 2부씩 첨부하여 준공 시 제출한다.

마) 본 용역수행 중 계약상대자의 과실에 의한 재해 및 민원사항은 계약상대자 부담으로 처리한다.

2.2. 작업범위

<철거도면>

3. 벽체공사

3.1. 종    류 : 2*4각재 + 석고보드 9.5mm 2겹 +친환경 도장+방염도장

3.2. 시공위치 : 도면 참조

3.3. 일반 사항

가) 시공 전 도장color 샘플을 담당자에게 제출한다.

나) 공사를 시행함에 있어 시공 전, 후 사진 2부씩 첨부하여 준공 시 제출한다.

다) 본 공사 중 발생되는 모든 재해 및 민원사항은 계약상대자 부담으로 한다.

3.4. 제품 사항

가) 주재료

① 칸막이 : 석고보드 2겹 시공을 하며 putty작업 후 친환경도장 3회 이상 시공한다.

② 목재도어 : 목재도어는 도어면에 내부를 확인할 수 있는 유리창을 설치한다.

③ 샷시 및 유리창호 : 운영사무실과 회의실 사이 칸막이 사이에 시를 이용한 슬라이딩창호를 설치하며 높이과 위치는 설치전 발주처와 협의 한다.

④ 선반 : 선반은 설치되어 있던 선반을 철거 시 보수하여 재활용하며 추가분에 대하여 동일한 규격과 재질을 이용하여 제작 설치한다.

⑤ 목재 및 페인트가 마감된 곳은 투명 방염페인트 작업하는 것을 원칙으로 한다.

나) 시공의 순서

① 바닥보양작업(pp보양지 및 비닐보양지)

② 사용가능한 선반 철거 및 기존 벽체 철거

③ 창호 및 도어 설치

④ putty작업 및 친환경 도장

⑤ 도장면에 방염페인트 도장

(도장 후 방염스티커를 발주처 협의 후 지정한 곳에 붙인다.)

⑥ 현장 청소

다) 도장시 주의사항

① 제품 사용 후 잔량은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 용기를 보관하여야 한다.

② 화기의 위험이 있으므로 절대 화기 근처에 보관하거나 작업하지 말아야 한다.

③ 밀폐된 장소에서는 도장을 하여서는 안 된다.

④ 먹었을 경우 또는 눈 접촉 시 즉시 전문의의 진단을 받아야 한다.

⑤ 용도 이외의 사용은 절대 금한다.(냄새 맡기, 연료용 등으로 사용을 금함)

⑥ 빈 용기 폐기 시 지정된 장소에 폐기하여야 한다.(폐기물관리법 준수)

3.5. 도면

<변경 평면도>

<미닫이창호>	<유리창호>	<목재도어>

* 시공사는 창호 및 목재도어를 발주 전 발주처와 협의하여야 하며 사이즈는 시공사와 발주처 협의하여 변경가능하다.

4. 수장공사

4.1. 종    류 : 방염 롤스크린

4.2. 시공위치 : 도면 참조

4.3. 일반 사항

가) 설치 전 방염필증을 담당자에게 제출한다.

나) 공사를 시행함에 있어 시공 전, 후 사진 2부씩 첨부하여 준공 시 제출한다.

다) 본 공사 중 발생되는 모든 재해 및 민원사항은 계약상대자 부담으로 한다.

4.4. 제품 사항

가) 기본 색상은 화이트색으로 양면 동일한 색상으로 진행한다.

나) 암막원단이 아닌 50%투과 되는 제품으로 한다.

다) 방염 작업을 마친 제품을 사용하여야 한다.

5. 청소 및 뒷정리

1) 모든 작업이 끝나면 깨끗이 청소하고, 여분의 자재나 쓰레기는 반출하도록 한다.

2) 제거 작업 종료 후 주변 현장을 바로 정리 ·원상 복구한다.

6. 기 타 사 항

1) 계약상대자는 공사의 목적 및 내용(도면, 내역서 등)을 충분히 이해하고 공사를 진행해야 하며,

2) 공사시행기간에 실질적인 공사를 완료해야 하며 추가적인 보수작업과 검토 후 최종 완료보고를 계약서 계약기간까지 제출해야한다.

3) 본 과업지시는 필요시 서울문화재단과 계약상대자와 협의하여 변경(조정)할 수 있다.

4) 과업지시서에서 언급되지 않은 부분도 KS를 원칙으로 한다.

5) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 사전에 발주부서와 협의하여 결정한다.

6) 공사시행 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업이 필요할 경우 발주부서와 협의하여 결정한다.

7) 반드시 안전보호 장구를 착용 또는 설치하고 작업하여야 한다.

8) 모든 공정은 감독관의 승인 후 시공한다.

9) 현장대리인은 반드시 현장에 상주하여야 하며, 공사관리, 안전관리등 모든 사항을 처리하여야 한다.

10) 본 과업지시는 필요시 과업수행자와 과업지시자간에 협의하여 변경(조정)할 수 있다.

11) 계약상대자는 성실하고 원활한 과업 수행을 위하여 신의와 책임의식을 갖고 추진하며, 서울문화재단과 긴밀한 협조체제를 유지한다.

12) 부주의 및 과업지시서 숙지 미달, 안전관리 소홀 등으로 발생되는 사고나 재해 등은 계약상대자가 민·형사상     책임을 진다

13) 서울문화재단은 과업수행이 부적절하다고 인정되는 경우 즉시 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 즉시 시정요구에 응하여야 한다.

14) 발주기관은 다음 상황이 발생하였을 경우에는 공사의 일시중지를 명할 수 있다.

① 계약대상자가 설계도서의 내용과 다르게 공사를 하거나 정당한 발주자의 지시에 응하지 아니한 때

② 공사종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정되는 때

③ 공사종사자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있는 때

④ 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정되는 때

⑤ 공사소음으로 인하여 인근에 피해를 줄 우려가 예상되는 때

⑥ 발주자가 설계내용의 검토나 변경이 필요하여 요청하는 때

15) 동 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 시방서, 국토교통부 제정 건축공사 표준 시방서, 건축법, 건설기술 관리법, 건설산업기본법, 산업표준화법, 근로기준법, 산업안전보건법, 환경보건관계법등 공사와 관계이 있는 법령 및 관련 규정 포함 , 지방계약 관계법령, 재단규정, 지침 등에 의거 서울문화재단과 협의하여 결정한다.

16) 계약상대자는 공사에 대한 전반적인 사진을 모두 찍어야 하며 최종 완료 보고시 모든 사진도 함께 서울문화재단에 제출해야 한다.

17) 과업 수행 시 직원들의 업무에 방해가 되지 않도록 행동해야 하고, 불가피하게 업무에 방해가 예상되는 경우 서울문화재단과 협의하여 일정을 조정한다.

18) 공사 진행 시 과업지시자의 변경 요구가 있을 경우 공사의 자재 및 인력 투입 범위가 벗어나지 않는 한 적극 응해야 한다.

19) 본 과업의 하자보수 기간은 작업완료일로부터 1년으로 한다.

20) 하자보수기간 중 AS 요청시 계약상대자는 적극 응하여 처리해야 한다.

21) 동 용역은 노무비 지급확인제에 적용되며, 계약상대자는 다음과 같이 관련서류를 발주기관에 제출해야한다.

- 공사근로자 노무비 지급내역서 제출

- 상용근로자로만 구성된 경우는 노무비 지급확인제 적용예외 신청서, 상용근로자 인적사항표, 건강보험납부확인서 제출