□ 양식 제7호 서식 - (세출·기금·중기 공통) 사업설명서 □ - 워드작성

예산서 P. 124

클라우드센터 인프라 구축 사업

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치	서울특별시 마포구 상암동 DMC 단지내 E3-3구역 [지도에서 보기]
총사업비	총 12,406,394천원/ [국비] [시비] /보조율(기준,실) [%]
사업내용	클라우드센터 운영을 위한 기반 인프라 구성
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체	데이터센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산
☑	□	☑	□	□	□	☑	□
‘15.8				`15.8
경상	투자
☑	□
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조	-
운영비보조	-
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	□	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	소장(과장)	과장(팀장)	주무관
정보기획관	데이터센터 (정보자원운영과)	이계헌	김영숙	김진석
3470-1100	3470-1420	3470-1439

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	-	198,312	12,406,394	12,208,082	6,156%
자산및물품취득비	-	-	10,225,050	10,225,050
시설비	-	-	1,400,000	1,400,000
공공운영비	-	-	485,544	485,544
사무관리비	-	1,050	293,800	292,750	27,881%
시책추진업무추진비	-	-	2,000	2,000
연구용역비		197,262	-	△197,262	100%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
자산취득비		10,225,050천원 -정보시스템 구축 : 2,998백만원 -백업시스템 구축 : 1,200백만원 -정보통신 장비구축 : 3,210백만원 -정보보호 장비구축 : 2,094백만원 -운영S/W 구입 : 723백만원	‘16년 클라우드센터 입주 시 장비구매
시설비		1,400,000천원 -정보통신공사비 : 670백만원 -전기시설공사비 : 400백만원 -CCTV및출입통제 : 80백만원 -인테리어공사비 : 224백만원 -기반시설관리 및 집기비품 : 26백만원	‘17~18층 시설공사
공공운영비		485,544천원 -위탁관리비(SBA) : 379백만원 -공공요금 : 106백만원	시설 인수 후 공공요금
사무관리비	1,050	293,800천원 -전산실 이전비용 : 293백만원	전산실 장비이전 비용
시책추진업무 추진비		2,000천원
연구용역비	197,262

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계					12,405
	자산취득비				10,225
	시설비				1,400
	공공운영비				485
	사무관리비				293
	시책추진업무 추진비				2

3		사업설명

□  사업목적

○  ‘16년 2월 준공예정인 클라우드센터 입주를 위한 17~18층 운영환경 구축

○  클라우드센터 운영을 위한 정보시스템, 정보통신, 정보보호 인프라 구축

○ 5개 전산실 장비이전․통합운영 등 서울시 제2데이터센터 구축

□  사업근거

○  법령상 근거

-  서울시 정보화 기본조례 제29조(통합센터 운영)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-  IT-Complex 건립 기본계획 수립(’08.6.18, 시장방침 제318호)

- 서울시 클라우드 컴퓨팅 기반 사업 추진 계획(정보자원운영과-2807, ’14.10.21)

-  서울시 클라우드센터 입주 및 운영계획(정보자원운영과-1866, ‘2015.6.3.)

□  사업내용

○  사업기간 : 2016. 1~ 12월

○  사업규모

-   5개 전산실 전산장비의 통합‧운영

․ 대상기관 :  시민봉사담당관, 교통정보과, 상수도사업본부, 역사박물관, 데이터센터(백업센터)

․ 5개 전산실 이전방향

‣ 1단계(2016) : 업무시스템 영향도가 적은 단순 시스템 이전 (시민봉사담당관, 교통정보과 일부, 역사박물관, 백업센터)

‣ 2단계(2017) : 업무시스템 프로그램 업그레이드 및 DB 이관 테스트 (교통정보과 일부, 상수도사업본부 일부)

‣ 3단계(2017~2018) : 전산실 장비 및 업무 프로그램 이관  (교통정보과, 상수도사업본부)

※ 전산실 이전이 단계별로 진행됨에 따라 각 단계별 노후장비 교체비용 소요 예정

-   클라우드 컴퓨팅 기반의 시스템 구축‧운영

․ 전산실 이전시 교체되는 노후장비를 통합하여 클라우드 환경으로 구성하여 예산절감 및 효율적인 자원관리 체계 구축

-   클라우드센터 기반시설 설치 및 운영

․ 정보시스템 운영을 위한 전기시설, 통신간선, 시스템실 인테리어, CCTV·출입통제 설치

․ 시스템실, 운영부속실, 물품보관실, 회의실 등  공간구성 및 집기 설치 등

-   클라우드센터 운영을 위한 기본 정보통신 인프라 구축

․ 백본망, 백오피스망(내부업무), 프론트오피스망(인터넷업무) 등 구성

․ 교통, 상‧하수도 정보시스템(전용 자가망구성 운영중) 연계‧확장성 고려

․ 정보시스템 보호 및 강화를 위한 정보보호 인프라 구축

․ 초고속자가망의 광코아를 확보하여 DR망, 센터 백본간 연계 구성

○  총사업비 : 12,765백만원

□  추진경위

○ ‘08. 06. 18	IT-Complex 건립공사 추진계획 수립

○ ‘12. 06. 08	IT-Complex 건립방향 숙의 (제2데이터센터 재검토)

○ ‘12. 09. 19	IT-Complex 건립계획 변경 (제2데이터센터를 DR센터로 축소)

○ ‘13. 12. 27	데이터센터 운영기반 고도화계획 수립

○ ‘14. 02. 12	IT-Complex 건립 입주시설(시스템실) 활용계획

○ ‘14. 08. 06	IT-Complex 건립 및 운영예산 조정 결과보고

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 사업발주 ⇒ 사업계약 ⇒ 사업수행 ⇒ 부분준공 ⇒ 준공완료

○  계약체결

- 계획수립 ⇒ 계약심의위원회(재무과) ⇒ 입찰공고(재무과) ⇒ 기술평가 및 협상 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2016년 이전 대상 전산실의 장비 이전 및 통합 운영

- 클라우드 컴퓨팅 기반의 시스템 구축‧운영

- 클라우드센터(17~18층)의 운영사무실 및 시스템실 등 기반시설 설치운영

- 클라우드센터 운영을 위한 정보시스템, 정보통신, 정보보호인프라 구축

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.1~12	12,706
사업계획 수립	2016.1		사업수행 세부계획 수립
사업 검토 및 계약심의	2016.2~3		보안성검토, 제안요청서 검토, 계약심의
사업 발주	2016.4~5		계약의뢰, 입찰공고
계약 체결	2016.6		제안평가회 및 협상, 계약체결
사업수행	2016.6~2016.12	12,706	사무공간 및 시스템실 공사, 전산 및 통신장비 도입 및 설치

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 해당없음
2014년도	‧ 해당없음
2015년도	‧ 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 사업수행 중

□   향후 기대효과

- 정보자원 증가에 따른 데이터센터(서초)의 시스템실 부족 해소

- 5개 전산실의 전산장비 이전 및 통합운영에 따른 운영비용 절감 및 관리 효율성 확보

- 재난복구(DR)센터의 확대로 서울시 정보서비스의 안정성 확보

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013
2014
2015	197,262			197,262	187,400		9,862

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 해당사항 없음

5		중기재정계획

(이호조 입력데이터 연동)

참 고 자 료 1

세부예산 산출 내역

번호	구 분		예산 내역	내역 설명
총 합 게			12,465,593
1		공공운영비	485,544
		ㅇ 고정관리비	379,200	10개월간 서울산업진흥원(SBA) 관리비
		ㅇ 전화요금	15,000	운영인력 24명, 운영부속실, 여유분 회선 적용
		ㅇ 상하수도 요금	912	운영인력 24명에 대한 상하수도요금 적용
		ㅇ 우편요금	432	운영인력 24명에 대한 우편요금 적용
		ㅇ 전기요금	70,000	시스템실 및 운영사무실 전기사용 요금
		ㅇ 지역 냉난방 사용료	20,000	시스템실 냉난방 요금
2	자산및물품취득비		10,278,049
		ㅇ 정보시스템 구축비	2,998,035	5개 전산실이전 노후장비 교체비
		- UNIX 통합서버	1,230,000	내부Unix 통합서버 4대(12개 파티션), 외부통합 2대
		- 가상화서버	721,369	가상서버 11대(가상화 솔루션, 가상머신OS 포함)
		- x86서버	115,236	x86서버 6대(OS포함)
		- 가상화스토리지	360,000	가상화스토리지(내부망 2대, 외부망 2대)
		- 통합스토리지	571,430	통합스토리지 1대
		ㅇ 백업장비 도입비	1,200,000	데이터 백업을 위한 장비
		- 백업장비	326,000	백업장비(내부망 1대, 외부망 1대)
		- SAN스위치	546,000	통합SAN스위치 3대(스토리지용2대, 백업용 1대)
		- 백업스토리지	328,000	데이터센터 백업 온라인 소산용
		ㅇ 정보통신 인프라 구축비	3,210,000	클라우드센터 네트워크 구성을 위한 장비 도입비
		- 공통영역	323,356	백본 L3스위치 2식
		- 백오피스용 스위치	700,383	서버팜 4식, 백본 2식 L4스위치 8식 등
		- 프론트오피스용 스위치	800,089	서버팜 4식, 백본 4식 L4스위치 8식 등
		- 유관기관망	320,000	라우터 2식, L4 스위치 4식
		- 운영관리용 스위치	219,549	운영관리 백본 2식, L2스위치 2식
		- DR통신망	496,623	DWDM 장비 2대, 백본 스위치 2식, L4 스위치 4식
		- 네트워크 관리	350,000	IP주소관리 1식, TMS I식, NMS 1식
		ㅇ 정보보호 인프라 구축비	2,094,000	클라우드센터 정보보호를 위한 장비 도입비
		- 방화벽	688,500	40G 2식, 10G 3식, 4G 2식, 통합관리 1식
		- 암호전송장비	238,227	VPN 장비 2식, 정책관리 1식
		- DB보안	484,000	DB보안 서버 장비 2식
		- 서버 보안	154,000	서버보안 서버 장비 2식
		- 웹방화벽	121,000	웹해킹 방어 및 차단, 10G
		- IPS	127,000	패킷 및 세션 기반 해킹 탐지 2식
		- Ddos 쉴드시스템	160,000	전용 GSLB, 트래픽매니저 1식
		- 로그관리시스템	121,273	로그관리 프로그램 및 H/W 포함
		ㅇ 운영소프트웨어 구입	723,015	정보시스템 운영용 SW 라이선스 및 백업 SW
		- 접근제어 라이선스	830,001	접근제어 라이선스 170본
		- SMS 라이선스	187,000	SMS 라이선스 170본
		- DBMS 라이선스	260,000	DB관리 라이선스 8본
		- 백업S/W 라이선스	164,150	백업 S/W 14본
		- 백신S/W 라이선스	28,864	백신 S/W 82본
3	시설비		1,400,000
		ㅇ 정보통신공사비	670,000	이중마루하단의 통신케이블 트레이설치, 17~18층 통신간선, 지능형통합배선관리시스템 등
		ㅇ 전기공사비	400,000	시스템 분전반 설치,전기트레이 공사 등
		ㅇ CCTV 및 출입통제	80,000	시스템실 CCTV 및 출입통제 추가 설치비
		ㅇ 인테리어 공사비	224,000	시스템실, 운영부속실, 물품보관실, 회의실 등 인테리어 공사비 (320m2×70만원)
		ㅇ FMS 및 사무실 집기	26,000	FMS서버, 온도센서, 바람막이, 사무실 집기비품 콘솔실 PC 및 집기, 회의실 집기
4	사무관리비		300,000
		ㅇ 백업센터 장비이전비용	300,000	백업센터 전산실 이전장비에 대한 운송비, 특수장비 사용료, 보험료, 설치비 등
5	시책추진업무추진비		2,000

(단위 : 천원)

참 고 자 료 2

5개 전산실 통합 및 이전 계획(안)

▢ 5개 전산실 이전대상

번호	기관	서버	스토리지	기타	랙수	비고
합 계		250	29	148	81
1	시민봉사담당관(응답소)	8	1	2	2	2016년 이전
2	교통정보과	187	12	109	47	년차별 이전
3	상수도사업본부	41	14	32	23	년차별 이전
4	서울역사박물관	6	1	1	4	2016년 이전
5	백업센터	8	1	4	5	2016년 이전

▢ 2016년 4개 전산실 이전 장비  : 총 48대 (교통정보과, 상수도사업본부는 년차별 이전 예정)

번호	이전기관	장비명	대수	주요업무
1	역사박물관	HP DL120	1	· 홈페이지, DB서버, · 사이버 박물관, 유물관리
		IBM x3650	1
2	시민봉사담당관	HP BL860c i4	2	· 응답소
		HP BL870c i4	1
		HP rx2800	2
3	교통정보과 (버스정책과 서버)	IBM p770	1	· e-BusNet관련 시스템 · 마을버스관련 시스템 · 버스정보(KT가로변BIS)
		HP BL860c i4	8
		통신장비(L2스위치)	14
		IBM TS3200	1
		HP MSL4048	1
		Oracle St2540	1
		히다찌 AMS2100	1
		HP p6350	2
		EMC VNX5200	1
4	데이터센터 (백업센터)	IBM p780	1	< 재해복구시스템 > · 세무종합정보시스템 · 세외시스템
		IBM x3550	1
		HP 슈퍼돔	1
		HP rx2800	1
		HP DL360	1
		HP p2000	1
		EMC VMAX	1
		통신장비(L2스위치)	4

※ 교통정책과 “기업체교통수요관리 시스템”은 노후장비로 클라우드센터 교체장비에 서비스 이관예정

▢ 장비이전 방안 : 클라우드 이전, 유닉스 통합 이전, 단순이전

○ 업무성격 및 업무 프로그램 상태 등을 고려하여 이전하되, 효율성이 높은 클라우드 이전을 우선 고려