문서번호	안전치수과-21476			★주무관		치수팀장	안전치수과장		건설안전교통국장
결재일자	2016.12.12.
				김산		이광철	함명수		전결 12/12 김희동
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
					주무관			송준하
		- 우이천 쌍문414앞교 재설치공사 – 준공기한 연기 검토 보고
2016.12.9.
강 북 구 (안전치수과)

- 우이천 쌍문414앞교 재설치공사 -

준공기한 연기 검토 보고

우리구에서 시행하고 있는 “우이천 쌍문414앞교(청호빌라앞) 재설치공사”시행과 관련, 동절기 품질저하를 방지하고자 준공기한을 연기하여 시공등 안전에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 우이천 쌍문414앞교(수유동 청호빌라 앞) 재설치공사

❍ 공사위치: 쌍문414앞교(강북구 수유동 701-1 인근)

❍ 공사기간: 2016. 4. 20. ∼ 2016. 12. 31.

❍ 총공사비: 2,300,000,000원

- 도 급 비(1,423,818,000원)

- 관 급 비(  350,776,330원)

- 이 전 비(  304,578,470원)

- 낙찰차액(  220,827,200원)

❍ 도 급 자: 청재종합건설(주) 대표 최기만

Ⅱ		추진현황

❍ 2016.04.20.: 공사계약 및 착공

❍ 2016.06.09.: 주민설명회 개최

❍ 2016.07.01.: 임시보도교 설치완료

❍ 2016.07.25.: 설계변경심의위원회 개최

❍ 2016.08.26.: C.I.P천공

❍ 2016.09.23.: 기존 교량 철거 완료

❍ 2016.10.17.: 교대 기초 설치완료

❍ 2016.10.31.: 교대 레미콘 타설

❍ 2016.11.30.: 거더 설치

Ⅲ		문제점

❍ 우이천 쌍문414앞교(청호빌라앞) 재설치공사를 2016.12.31.까지 완료코자 하였으나, 지장물(한전주, 가로등) 이설 및 잦은 강우로 인한 작업중단으로 실 작업일수가 부족한 실정이며,

❍ 12월 현재 강재거더 설치공종을 완료 하였으나 상부슬래브 레미콘 타설 및 포장 등 동절기 품질의 영향을 많이 받는 공종이 남아있어 계속 진행 시 주요공종의 품질저하가 우려됨.

❍ 우이천 쌍문414앞교(청호빌라앞) 재설치공사와 연계된 폐기물처리 용역의 용역기간 또한 연기가 불가피한 실정임.

- 폐기물처리용역 개요

·용 역 명: 우이천 쌍문414앞교 재설치공사 외 2건 건설폐기물 처리용역

·도 급 자: 주식회사 삼정이앤티 대표 이수경

·용 역 비: 금56,641천원(쌍문414교 폐기물 44,930천원)

·용역기간: 2016. 04. 27. ~ 2016. 12. 31.

Ⅳ		조치계획

❍ 기온 강하가 예상되는 동절기 기간 중(2016.12.5.~2017.2.28.) 공사를 중지하고 해빙기 이후 공사를 재개 함으로서 주요 구조물의 품질을 향상하고자 하며, 2017년 수방기간 이전까지 공사를 완료하여 재해예방 및 공사시공에 만전을 기하고자 함.

- 준공기한 변경내역

·당초: 2016.12.31.

·변경: 2017.05.15.  끝.