“행복한 변화, 사람사는 동작”
		동작구
수신자		내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(건설폐기물 운반 및 처리용역)

우리구에서 시행중인 『2016년 관내하수시설물 및 하천 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2016년 관내하수시설물 및 하천 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

나. 용역기간 : 2016. 2. 5 ~ 2016. 12. 31.

다. 도 급 자 : (주)미림이엔씨 대표 김미경, 가람산업 주식회사 대표 고영준

라. 예산과목

1) 안전치수과, 안전한 생활환경 구축, 하수도 관리, 하수시설물 관리, 시설비---125,191천원

2) 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로정비(주민참여), 상도로37길일대 하수관개량, 시설비                                                       --- 5,290천원

3) 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로보수보강, 사당4동300-10일대 원형관로 보수보강, 시설비                                                          --- 4,709천원

4) 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로보수보강, 대방동 39-2일대 원형관로 보수보강, 시설비                                                           --- 660천원

5) 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 상도1동390-2번지일대하수관로개량, 시설비                                                     --- 26,060천원

마. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 용 역 비	119,700,000	161,920,000	증) 42,220,000
도 급 비	119,700,000	161,920,000	증) 42,220,000

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 보고서 1부.  끝.

주무관							김정선			하수계획팀장					代김정선					안전치수과장					황왕연						안전건설교통국장					12/13 이학구
협조자				계약팀장						이홍열					재무과장							김병인					기획재정국장								유제환
시행			안전치수과-19292									(						)		접수													(					)
우	06928					서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동)															/			www.dongjak.go.kr
전화		02-820-9147						/전송			820-1453					/	kjseon7@seoul.go.kr														/	대시민공개