“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경 고시(사업기간 연장) 알림

1. 임대주택과-15261호(2016.12.6.) 「상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경 승인고시」와 관련입니다.

2. 우리시가 시행하고 있는 상암택지개발사업에 대해 택지개발촉진법 제8조 및 제9조에 의한 개발계획 및 실시계획을 변경승인(미준공 공구 사업기간(준공일) 연장)하고 붙임과 같이 시보에 고시하였음을 알려드립니다.

가. 변경내용 : 6, 7공구 사업기간(준공일) 연장

구 분	사 업 준 공 일
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구
기 정	2012.06.30 (사업준공)	2006.12.31 (사업준공)	2010.01.31 (사업준공)	2011.12.31 (사업준공)	2012.06.30 (사업준공)	2016.12.31	2016.12.31
						2017.12.31	2017.12.31
변 경

나. 연장사유 : 일부 공사 진행중(진입도로 개설)으로 인한 사업기간 부족

국·공유지 수용협의 지연에 따른 사업기간 부족

붙임 : 시보 고시문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	경제정책과장,국토교통부장관(신도시택지개발과장),마포구청장(도시계획과장),서울주택도시공사 사장(택지계획처장)
주무관	최영		택지개발팀장	김준표		임대주택과장	12/15 임인구
협조자	주무관	장천섭
시행	임대주택과-15735	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 3층 임대주택과	/
전화	02-2133-7081	/전송	02-2133-0756	/		/	대시민공개