문서번호	기전과-10280
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		박심근	12/16 代박영종
협조
	주무관		문준호

설계변경 검토보고

〈2016년 경관조명 유지보수공사(연간단가)〉

2016.12

성동도로사업소

(기 전 과)

2016년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경 검토보고

2016년 경관조명 유지보수공사(연가단가) 작업지시(1차~4차)에 따른 완료보고서 집계결과, 계약물량의 변동이 있어 아래와같이 설계변경을 실시하고 준공 처리코자 함

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 경관조명 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사개요

- 한강교량 경관조명 유지관리 1식

○ 공사기간 : 2016.02.18. ~ 2016.12.31.

○ 도 급 비 : 금39,561,450원

○ 도 급 자 : *********

▣ 설계변경 현황

○ 사유 : 추정물량으로 설계된 작업물량이 공사 추진과정 중 물량변동, 신규물량이 발생되어 수량(내역)조정 필요

○ 주요변경 내역

공종	규격	단위	수량		증·감
			변경전	변경후
차단기 교체 설치	NFB,ELB 2P30A이하	개	1	20	증19
전력케이블 신설	TFR-CV 600V 16㎟/1C*4열동시	m	10	8	감2
투광기 세척	외부	개	1	563	증562
CCL.LED 세척	외부,장비사용	개	100	350	증250
경관조명 램프 교체	투광기,CCL	개	1	113	증112
경관조명 안정기 교체	400W 이하	개	1	50	증49

○ 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증·감	비고
총공사비		39,561,450	39,561,450	-
도급비	공급가액	35,964,955	35,964,955	-
	부 가 세	3,596,495	3,596,495	-
	합 계	39,561,450	39,561,450	-

▣ 예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비.(401-01)

▣ 향후계획

○ 물량변동 내역에 의거 설계변경(정산) 시행 후 준공 처리코자 함

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.