문서번호	급수운영과-28241
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
강대유	최용진	12/16 代이승완
협 조
	주무관		代정재필
	주무관		박상권
	주무관		남상욱
	주무관		김종필토

설계변경 심의결과 보고

(2016년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약) )

2016. 12.

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2016년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)」에 대해 신규공종 및 시공물량 증·감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 2016년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)

2) 공사기간 : 2016. 6. 30. ~ 2017. 06. 30.

3) 공사비 변경

구 분	금 액		증·감
	당 초	변 경
도 급 액	732,552,100	732,552,000	변동없슴

4) 도 급 자 : ㈜씨엔케이굿즈  대표 정성훈

5) 감 리 자 : ㈜이준엔지니어링 박명선

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정 : 2016. 12. 16. 14:00

2) 심의장소 :  급수운영과 사무실

3) 심의위원장 : 급수운영과장

4) 심의위원 : 시설7급 김종필, 시설7급 남상욱, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수

3. 심의 내용

1) 물량변동의 적정성 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 신규공종 단가 산축 적정 여부 : 적정함

3) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

4) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

5) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 결정서 1부.

2) 설계변경사유서 1부.

3) 설계변경내역서 1부. 끝.