등록번호

교통행정과-74298

★주무관

교통시설팀장

교통행정과장

안전건설교통국장

등록일자

2016.12.19.

인성분

조봉기

이준영

12/20

이경우

결재일자

2016.12.20.

공개구분

부분공개(6)

협  조

주무관

조영경

2016 Green Parking사업

설 계 변 경  보 고

서 대 문 구

교통행정과

2016 Green Parking사업 설계변경 보고

‘2016 Green Parking사업’이 완료됨에 따라 시공물량 변경내역을 반영하여 준공(정산)을 위한 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		추진근거

2016 Green Parking사업 추진계획 [교통행정과-10114호(2016.3.3.)]

2016 그린파킹사업(연간단가) 시행 [교통행정과-11438호(2016.3.10.)]

Ⅱ		사업개요

사 업 명 : 2016 Green Parking사업(연간단가)

사업개요

- 구조물 철거 150㎡

- 콘크리트, 화강석블럭 포장 760㎡

- 수목식재 등 기타

계약내용

- 계약업체 : 엘림토건㈜ 대표 이종만

- 계약금액 : 176,515,000원

- 사업기간 : 2016. 3.30. ~ 2016.12.31.

추진경위

- 2016. 3.25. : 계약

- 2016. 4.21. : 제1차 작업지시 – 9가구(16면)

- 2016. 5.13. : 제2차 작업지시 – 2가구(5면)

- 2016. 6.17. : 제3차 작업지시 – 4가구(5면)

- 2016. 7.11. : 제4차 작업지시 – 3가구(9면)

- 2016. 7.12. : 제5차 작업지시 – 1가구(2면)

- 2016. 7.20. : 제6차 작업지시 – 1가구(1면)

- 2016. 8.24. : 제7차 작업지시 – 2가구(3면)

- 2016. 8.26. : 제8차 작업지시 – 2가구(3면)

- 2016. 9.20. : 제9차 작업지시 – 1가구(1면)

- 2016.11.22. : 제10차 작업지시 – 1가구(2면)

※ 총 26가구(47면) 담장허물기사업 시행

Ⅲ		예산 집행현황

예산배정액 : 332,800천원(시비 : 172,800천원, 구비 : 160,000천원)

구 분	예산배정액	발주금액	계약금액	낙찰차액 (계약심사잔액 포함)	집행잔액	비고
계	332,800,000	246,394,000	209,837,000	36,557,000	86,406,000	※ 추가교부액(시비)
그린파킹사업		210,000,000	176,515,000	33,485,000
건설폐기물 처리용역		16,394,000	14,492,000	1,902,000
무인자가방범 시스템 구매설치		20,000,000	18,830,000	1,170,000

배정내역

- 2016. 1. 4. : 구비 배정     – 160,000천원

- 2016. 2.11. : 시비(1차) 교부 –  86,400천원

- 2016. 7. 1. : 시비(2차) 교부 –  51,840천원

- 2016. 8.24. : 시비(3차) 교부 –  34,560천원

Ⅳ		설계변경

‘2016 Green Parking사업’은 가구주의 담장허물기사업 신청에 따라 진행되는 사업으로써,

- 2016.3월 예산배정 범위내에서 당초 추정물량을 산정하여 연간단가사업으로 추진하였으나,

- 현장여건 및 당초 신청내역과 상이하게 변경(추가)을 요구하는 가구주의 요구사항 반영 등 전체 시공물량이 변경되어 설계변경(정산)하고자 함.

※ 주요 변경사항 : 시공물량 변경

○ 구조물 철거 150㎡ → 140㎡

○ 콘크리트, 화강석블럭 포장 760㎡ → 797㎡

○ 수목식재 등 기타내역 변경

설계변경 내역	(단위 : 원)

구 분	원 설 계	변경설계	증·감	비 고
도 급 비	176,515,000	184,160,000	증) 7,645,000

- 변경사유 : 본 공사는 당초 추정물량으로 발주되었으나, 시공물량 변경에 따라 계약금액이 증액되어 변경(정산)처리

※ 증액되는 공사비는 추가 교부(배정)된 예산에서 지출(정산)

첨부 : 1. 작업지시 변경내역 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 가구별 물량 산출내역 1부(별도 첨부).

4. 제비율 검증표 1부.  끝.