함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	충무교확장공사 저촉상수도관 이설공사 직접 시행(요청) 회신

1. 토목과-1717(2014.2.14.)호로 상수도관 이설요청이 있어, 급수운영과-4631

(2014.3.06.)호로 이설승인조건을 부여 원인자부담으로 상수도관 이설공사가 현재 진행중으로 서울대에서 신림역방향 500mm는 이설공사가 완료되었읍니다

2. 당초 신림역에서 서울대 방향 400mm 관로는 신림6배수지(신림6동89소재)에서 신림동 409.412(황해단지) 주변 약 3,400세대를 공급하는 관로로써 이설공사시 공급방향이 바뀌어 급수민원(적수) 예방을 위하여 가배관(300mm)으로 공사중 임시로 급수를 하고 철거(폐쇄)를 하는 것으로 사전협의 후 귀구에서 이설계획도서가 제출되어 승인되었으며

3. 공사과정에서 공기지연, 예산 등을 사유로 가배관을 400mm로 부설(분기 300mm) 임시급수 후 분기를 400mm로 변경하는 것으로 귀구 관계자와 업무협의가 되어, 당초 이설계획 도서 변경을 우리사업소에 요청토록 하였으나, 귀구에서 2014,3,18 토목과- 3238호로 충무교

확장공사 준공기한이 촉박함 등을 들어 우리사업소에서 직접 이설공사를 요청하였읍니다

4. 우리사업소에서 이설공사비(원인자부담금)를 상수도특별회계로 입금토록하고 이후

우리본부에서 예산(개조공사비)를 교부받아 이설공사를 시행할 경우 귀구 본공사 준공기한(‘14,5,31)내  준공이 어려울것으로 판단되므로 그동안 협의된 내용(가배관 300mm 미부설 및 400mm부설 임시 급수후 분기구경 변경)으로 이설공사 진행이 공기 단축에 도움이 될것으로 판단되오니 귀구에서 원인자 이설(당초계획 변경) 또는 우리사업소에서 이설공사 추진을 재검토하여 통보하여 주시면 적극 협조 예정입니다. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	손현정		급수설비팀장	代한현숙		급수운영과장	전결 03/20 장시명
협조자
시행	급수운영과-6010	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4559	/전송	3146-4589	/		/	대시민공개