문서번호	시설관리과-11753
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	시설안전부장
정준석		정윤홍	12/23 강신재
협조

용역 설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2016. 12.

상수도사업본부

(시설관리과)

용역 설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 본부에서 추진중인『대형 제수밸브 점검·정비 및 정밀안전   진단 용역(강남지역)』의 설계변경 심의위원회 개최결과를 보고 드림.

□ 용역현황

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 및 정밀안전진단 용역(강남지역)

－ 강서, 남부, 강남, 강동수도사업소 관할지역

□ 용역개요 : 대형 제수밸브 점검정비 1,928개소

정밀안전진단 142km

□ 용역기간 : 2016. 5. 25.∼12. 31.

□ 계 약 액 : 1,361,000,000원

□ 용 역 사 : ㈜한국시설안전연구원, ㈜건양엔지니어링

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

□ 일    시 : 2016. 12. 23.(금) 14:00

□ 장    소 : 시설안전부 회의실

□ 위원회 구성

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설6급 홍석현, 강정구, 공업6급 장석춘, 임종수

- 간  사 : 시설6급 정준석

□ 심의결과 : 원안 가결

□ 설계변경 현황

❍ 설계변경 사유 : 실제 시공에 따른 물량 증감

- 제수밸브 점검정비 수량 증가 5개소

- 밸브 및 밸브실 관로 도장 감소 12개소

- 관로 내면상태 누수진단 감소 1km

구 분	당 초	변 경	증 감
도급비	1,397,960,000	1,361,000,000	36,960,000

❍ 설계변경 금액                                   (단위 : 원)

□ 향후계획

❍ 설계변경 심의결과에 의거 설계변경 시행

붙임 : 1. 변경 설계서 1부.

2. 심의 의결서 1부. 끝.