문서번호	안전치수과-20447		주무관			치수팀장			★안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2016.12.30.		조재민			송병석			황왕연	12/30 이학구
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

사당1동 저지대 침수해소를 위한

까치어린이공원 빗물저류조 설치공사 실정 보고

2016. 12.

안전건설교통국

(안전치수과)

사당1동 저지대 침수해소를 위한

까치어린이공원 빗물저류조 설치공사 실정 보고

집중호우시 저지대 지역인 사당역 일대의 침수를 방지하기 위해 단기대책으로 시행중인 까치어린이공원 빗물저류조 설치공사에 대한 실정보고임.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 본동 노량진 배수지 일대 하수박스 보수보강공사

○ 공사개요

- 토목공사 : 저류조 V=8,000㎥, L45.2m × W22.1m × H14.3m

- 기계공사 : 배수펌프 5.6㎥/min×4대, 지배수펌프 2대등

- 조경공사 : 식재 2,953주, 시설물 22종 43EA 등

- 부 대 공 : 1식

○ 공사기간 : 2016. 12. 01 ~ 2018. 03. 17

○ 총공사비 : 7,080,635천원(시비)

- 도급비 5,700,000천원, 폐기물 7,865천원, 관급자재 1,169,670천원, 이설비 203,100천원

○ 도 급 자 : 삼보종합건설(주) 대표 유 봉 기

Ⅱ		실 정 보 고 사 항

EGI 휀스(2.4m)를 방음휀스(6m)로 변경(건설사업관리단 실정보고)

공사장 주변 연도변조사(사전 및 사후조사) 실시(건설사업관리단 실정보고)

책임건설사업기술자 배치기간 조정(담당자 보고사항)

Ⅲ		검 토 및 조 치 계 획

EGI 휀스(2.4m)를 방음휀스(6m)로 변경

⇒ 공사장 주변은 3면이 4~5m폭의 이면도로이며, 공사장 남측은 주택이 인접해있어, 공사진행중 소음ㆍ분진등에 의한 민원발생이 예상되어 EGI휀스를 방음휀스로 변경하고, 공사내역 반영시 제경비 포함으로 공사비가 증액되어 예산절감을 위해 조달청 총액계약으로 처리하여 사전 민원을 예방하고자 함.

· 물량 증·감 및 개략공사비

공종명	단위	수량			개략공사비(천원)		비고
		기존	변경	증‧감
EGI 휀스(H=2.4m)	m	170	-	감170	감	7,854
가설방음벽(H=6m)	m	-	170	증170	증	65,956	이설비
합 계					증	58,102

공사장 주변 연도변조사(사전 및 사후조사)실시

⇒ 현장 지질조사를 통해 풍화암이 G.L로부터 12~15m 깊이에 위치하고 있고, C.I.P 흙막이 가시설 공사시 소음 및 진동이 발생되어 민원발생 소지가 있으며, 현재 공사장 터파기 깊이(H=17m)에 따른 공사장 주변 건물 안전에 대해 주변 주민들 민원이 발생되고 있어, 공사시행전 주변 인접건물(18개동)에 대해서 연도변 조사를 시행하여 공사로 인해 발생 될 수 있는 건물 안전문제에 대해 대처하고자 함.

· 물량 증·감 및 개략공사비

공종명	단위	수량			개략공사비(천원)		비고
		기존	변경	증‧감
연도변조사 (사전 및 사후조사)	식	-	1	증 1	증	33,869
합 계					증	33,869

책임건설사업기술자 배치기간 조정

⇒ 공사 관련 민원 발생으로 계획했던 식재이식이 이루어지지 않아 동절기 공사가 불가하여 1월~2월 배치계획된 책임건설사업기술자에 대하여 해빙기 공사전까지 배치기간 조정(2017.1.1.~2.28까지 철수)

┏ 당 초 : 2016.12.1.~2017.12.31

┗ 변 경 : 2016.12.1.~12.31, 2017.3.1.~12.31

총공사비 증·감

(단위:천원)

구분	당초	변경	증‧감		비고
총공사비	7,080,635	7,172,606	증	91,971
도급액	5,700,000	5,726,015	증	26,015
폐기물처리비	7,865	7,865		-
이설비	203,100	269,056	증	65,956
관급자재	1,169,670	1,169,670		-

Ⅴ		향후계획

현장 여건에 따른 물량 증감에 대해 도급자로 하여금 우선 공사를 시행토록 조치하고, 향후 계약금액 조정시 반영하여 정산 처리코자 함.   끝.

붙  임 : 실정보고서 1부(세부사항 별첨). 끝.