등록번호

푸른도시과-139

주무관

자연생태팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2017.1.2.

정원석

김종철

양종수

01/02

이경우

결재일자

2017.1.2.

공개구분

대시민공개

협  조

안전치수과장

조용기

아름다운 변화 열린구정 행복도시 서대문

2017년 동절기 대비

급경사지 및 산림시설물 점검·관리 계획

서 대 문 구

푸른도시과

2017년 동절기 대비 급경사지 및 시설물 점검 계획

동절기 대비 급경사지 및 산림 내 시설물 등의 안전점검을 실시하여 구민생활의 편의와 안전에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검대상

□ 급경사지 : 17개소

연번	지역명	지정면적(㎡)	등급	위험방지시설	비고
1	홍제동 산39-18(조한아파트)	2,500	B	락볼트, 낙석방지망, 낙석방지책
2	홍제동 산33-113(모랫재어린이공원)	3,000	C	락볼트, 낙석방지망
3	홍제동 산1-112(무악재)	1,200	B	녹생토, 낙석방지책
4	홍은동 산11-1(미성아파트)	4,000	C	낙석방지망, 낙석방지책
5	홍은동 산21-8(백련연립)	800	C	낙석방지망, 식생토낭
6	홍은동 277-110(탑빌라트)	90	C	-	옹벽
7	연희동 713(파크빌)	1,200	C	낙석방지책
8	홍은동 산11-214(홍은현대아파트)	15,000	C	낙석방지망, 낙석방지책
9	홍은동 산11-218(홍은중)	6,000	B	낙석방지망, 낙석방지책
10	홍제동 82(홍제한양아파트)	1,300	C	낙석방지망, 낙석방지책
11	연희동 520-252(삼호빌라 인근)	200	C	낙석방지망, 피복,식생토낭, PE플륨관
12	홍제동 산1-1, 산9-81(개미마을)	1,200	B	낙석방지책
13	홍제동 산1-1, 산5-3(쌈지공원)	1,200	C	낙석방지망, 낙석방지책
14	영천동 5-631(독립문삼호APT)	1,650	D	낙석방지망, 낙석방지책	옹벽
15	연희동 713(연희동 712-3 전면)	540	D	녹생토, 낙석방지책	옹벽
16	홍제동 산33-136(모랫재어린이공원 인근)	2,200		낙석방지망	실시설계 완료
17	연희동 산2-75(홍제천 인공폭포 옆)	2,000		낙석방지망	실시설계 완료

□ 점검기간 :  01. 02 ∼ 01. 06

Ⅱ		세 부 사 항

□ 급경사지

○ 점검방법 : 「급경사지 재해위험도 평가기준」에 근거 담당 공무원 자체 점검

○ 주요점검사항

- 공      통 : 기존 위험방지시설의 상태(교체필요 여부) 육안 점검

- 자연 비탈면 또는 산지 : 지하수 상태, 토사유실 여부, 위험수목 유동 여부 등

(연희동 713, 연희동 520-252, 홍은동 산21-8)

- 옹      벽 : 균열 진행 여부, 배수공 막힘 여부, 백태 추가 발생 여부 등

(홍은동 산11-96, 연희동713)

- 인공 비탈면 : 암의 풍화 정도, 지하수 상태(표면의 젖은 정도), 절리 발생 여부 등

(그외 12개소)

□ 민원발생지역

○ 홍은동 산1-57(홍은 한마당 밑)

- 담당자 및 외부전문가 합동점검(동절기 재난취약시설 합동점검 기 실시)

○ 홍은동 산1-135(법륜사 뒤)

- 담당자 및 외부전문가 합동점검(서대문구 기술자문단 활용)

□ 기타 점검지역

○ 홍은동 산1-81(홍은동 삼덕교회 위)

○ 홍은동 산21-1(백련사 마을버스 회차지 밑)

○ 홍은동 산21-8(백련연립)

- 임시 보호 조치 시설(방수포 및 로프)의 파손 여부 및 토사유출사항 확인

Ⅲ		향 후 계 획

□ 급경사지는 「급경사지 재해예방에 관한 법률」제5조에 의거하여 안전점검을

실시하도록 하겠음, 홍은동 산21-8(백련연립) 배면에 대하여 근본적인 보강이

어려운 상황으로 해빙기, 우기 등 상시적인 점검을 실시하도록 하겠음.

□ 추진일정

○ 2017. 01. 02 ∼ 01. 06 : 급경사지 담당 공무원 자체 점검 및 합동점검

○ 2017. 01.             : 점검 지적사항 조치(계획수립)

○ 2017. 02.              : 공사 발주 (2017년 산사태 예방 사방사업)

○ 2017. 02. ∼ 06.       : 정비공사 시행 (2017년 산사태 예방 사방사업)

□ 중점추진사항

○ 급경사지 : 재해위험도 평가표 갱신 및 NDMS 이력 갱신 관리

○ 민원발생지역 : 외부전문가 점검 결과 및 조치 사항을 근거로 안전조치 실시

○ 홍은동 산1-81(홍은동 삼덕교회 위)

- 기 통보한 바와 같이 조치해야할 사항 및 파손에 따른 책임사항 등을 관리자에게 통보

끝.